함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	굴착폭 변경 등 실정보고 회신(동일로 송배수관정비공사)

1. 문서번호 공사감독2처-13567호(2014.09.02.)와 관련입니다.

2. 귀 공단에서 감독하는“동부수도사업소 동일로 송배수관정비공사”의 굴착폭 변경 및 포장두께 증가에 대한 실정보고와 관련하여 아래와 같이 검토 회신하니 공사감독에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 검토결과

- 실정보고 사항과 같이 굴착폭은 2.2m로 변경시공하고, 직관부는 깨기량만 반영하고 굴착토공은 설계대로 시공토록하며, 증가되는 토공 및 폐기물량은 정확히 산출하여 공사관리에 만전을 기하여 주시고,

- 굴착폭 변경 및 포장두께 증가에 따른 현장 시공 시 관리감독을 철저히 시행하여 향후 설계변경에 반영하고 정산시행에 만전을 기하여 주시기 바람.

끝.

	동부수도사업소장
주무관	최호림		급수설비팀장	김태형		급수운영과장	09/04 최명익
협조자
시행	급수운영과-23316	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2742	/전송	02-3146-2789	/	tig2r2000@seoul.go.kr	/	부분공개(7)