함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 및 정산시행(기계연간단가)

1. 정수시설과-2959(2015.9.04)호 관련「2015년기계설비보수공사(연간단가)」시행중 발생한 신규공정 및 공사물량 증․감분과 사용하지 않은 경비에 대하여 설계변경 및 정산코자합니다.

가. 공 사 명 : 2015년 기계설비보수공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2015. 4. 27 ～ 2016. 03. 31

다. 도 급 자 : (주)유진아이엔비   대표 정 요 한

라. 계약금액 : 금92,376,000원{정수장(70,376,000원),취수장(20,000,000원)}

- 정수장(기계설비유지관리 50,376,000, 배출수처리시설유지관리 20,000,000원)

마. 변경금액 : 금101,244,000원 (+8,868,000원)

{(정수장81,244,000원),취수장(20,000,000원)}

- 정수장(기계설비유지관리 61,244,000, 배출수처리시설유지관리 20,000,000원)

바. 예산과목

- 정수장 : 상수도사업비용,영업비용,정수비,수선유지교체비,기타교체비

- 취수장 : 상수도사업비용,영업비용,원수및취수비,수선유지교체비,기타교체비

사. 설계변경금액으로 변경계약 하고자 함.

따로붙임 1. 설계변경 심의위원회 개최결과 보고서 1부.

2. 합의각서 1부

3. 변경설계서 1부 .끝

주무관	송종봉		주무관	代황여진		정수시설과장	안길찬		강북아리수정수센터소장	09/04 박기석
협조자
시행	정수시설과-2967	(		)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171(삼패동598)	/
전화	02-3146-5873	/전송	02-3146-5807	/	uusangjong@seoul.go.kr	/	대시민공개