투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	용역준공기한 연기 요청(남산공원 시설재정비사업 실시설계용역)

1.  시설과-5682(2015.8.11.)호와 관련입니다.

2. 『남산공원 시설재정비사업 실시설계용역』의 준공기한을 다음과 같이 연기하고자 하니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공사현황

- 용 역 명 : 남산공원 시설재정비사업 실시설계용역

- 용역기간 : 2015.8.18. ~ 2015.9.6.

- 도 급 액 : 금12,630,000원

- 도 급 자 : 애림조경기술사사무소 대표자 강대균

나. 준공기한 연기

용 역 명	계약일	착수일	준 공 기 한		비 고
			당 초	변 경
남산공원 시설재정비사업 실시설계용역	2015.8.18	2015.8.18	2015.9.6	2015.9.18.

다. 연기사유 : 남산공원 전체 체육시설물 및 안내판 전수조사에 따른 용역수행기간 부족

붙임  1. 검토서 1부.

2. 준공기한연기의뢰서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	황윤채		조경팀장	남상국		시설과장	09/04 代김윤철
협조자
시행	시설과-6359	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231, 중부공원녹지사업소 시설과	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5968	/전송	02-3783-5969	/		/	대시민공개