보고서(급수공사연기)

주무관	시설관리과장			결재
박상권	09/04 代김만재
협 조

문서번호 :	시설관리과-14735

강북구 상수도공사 감독업무 수행중 **************** 급수공사 연기 요청이 있어 아래와 같이 보고합니다.

2015. 9. 04.

보고자 : ***********************

제목 : 급수공사 연기 보고

□ 공사현황

연번	주소	수요가명	공사기간	지시번호	비고
1	**************	***	2015.9.01.~9.04	신설-35

□ 연기요청사항

연번	주소	수요가명	연기요청 사유	공사연기 기간
1	**************	***	수요가 연기요청 (비계철거 작업)	2015.9.10

□ 검토결과

○ 상기 위치에 대하여 일정 재협의로 공사기간 내 공사가 어려워 공사기간을 아래와 같이 연기하고자 합니다.

연번	주소	수요가명	당초 공사기간	변경 공사기간
1	**************	***	2015.9.01.~9.04	2015.9.01.~2015.9.10

□ 귀책사유 : 북부수도사업소

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

첨부 : 공사연기 요청서 1부(따로붙임).  끝.