투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	설계변경(1회) 의뢰(2015년 관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)-북부

우리사업소에서 시행중인 『2015년 관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)-북부』에 대하여 아래와 같이 설계변경(1회) 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2015년 관내포장도로 불량맨홀공사(연간단가)-북부

나. 공사기간 : 2015. 05. 21 ~ 2015. 12. 31

다. 도 급 자 : ㈜우암건설  대표 고원준

라. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분		당 초 금 액	변 경 금 액	증 감	비고
총 공 사 비		432,300,700	500,000,000	증) 67,699,300
도급비	공급가액	386,637,000	448,181,819	증) 61,544,819
	부가가치세	38,663,700	44,818,181	증) 6,154,481
	계	425,300,700	493,000,000	증) 67,699,300
이 전 비		7,000,000	7,000,000	-

마. 설계변경사유 : 기관별 맨홀정비 수량 증,감에 따른 설계변경

바. 예산과목

- 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로

정비공사, 시설비및부대비, 시설비

첨부 : 설계변경(1회) 관련도서 1부.  끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
주무관	최완		도로보수과장	09/04 이석재
협조자
시행	도로보수과-8714	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913(번동)	/
전화	02-944-5436	/전송	02-945-5072	/	*********@seoul.go.kr	/	대시민공개