투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	삼성물산(주)
(경유)
제목	공기연장에 따른 추가비용 청구 건에 대한 회신

1. 삼건월드컵 2015-380(2015. 9. 2.)호와 관련입니다.

2. 귀 사와 계약체결하여 시행중인 「월드컵대교 건설공사」 공기연장에  따른 “추가비용 청구 건”에 대하여 아래와 같이 회신 하오니 현장 및 인력관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 공기연장과 관련하여 공사규모·내용·기간에 적정한 현장 유지·관리에 소요되는 인력투입계획을 제출 하시기 바라며(건설사업관리단 경유)

나. 향후 연장기간 내 발생할 추가비용으로 귀 사에서 제시한 금액      (14,079,863,080원)은 노무량, 단가 등에 대하여 상호 협의 및 검증되지 않은 금액으로 추후 “가”항의 인력투입계획과의 연계, 관련 법률에 적합여부 등을 종합 검토하여 조치할     사항임을 알려드립니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	오열상		토목총괄과장	代오열상		토목부장	09/07 노우성
협조자	주무관	장기철
시행	토목부-18615	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-2542	/전송	3708-2599	/		/	대시민공개