투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 연기 요청(중동빗물펌프장 증설 기계공사)

1. 우리 본부에서 시행 중인 『중동빗물펌프장 증설공사』에 소요되는 관급자재에 대하여 아래와 같이 납품기한 연기요청 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 요청내용

자재명		계약번호	계약자	계약금액(원)	납품기한
					당 초	변 경
사류펌프		12132100200	남강펌프	274,000,000	’14. 02. 28	’14. 07. 30
수문권양기		12131026700	우일산업(주)	79,000,000
제진기		12132068800	온누리유공자 복지회	520,000,000
천장크레인		12132086000	에이치피아이	58,512,630
밸브	체 크	121311401600	㈜동양밸브	57,607,000	’14. 01. 19
	B.F.V
	신축관	121311403200		7,852,900

나. 연기사유 : 선행공정 지연에 따른 관급자재 사용시기 미도래

다. 계약금액 및 수량 : 변경없음

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

따로붙임  1. 납품기한 연기 검토보고서 1부.

2. 납품업체 연기 동의서 1부.     끝.

	설비부장
주무관	조기성		시책사업과장	이흥복		설비부장	01/02 박기형
협조자	경리과장	최영미
시행	설비부-27	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층	/	http://smih.seoul.go.kr/
전화	3708-8651	/전송	3708-8659	/	paul1201@seoul.go.kr	/	대시민공개