서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(태릉~구리IC간 광역도로확장 기본계획 용역)

우리과에서 시행 중인 「태릉~구리IC간 광역도로확장 기본계획 용역」에 대하여 다음과 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용역명 : 태릉~구리IC간 광역도로확장 기본계획 용역

2. 계약자 : ㈜선진엔지니어링종합건축사사무소

3. 준공기한 연기내역

- 당 초 : 2015. 09. 10.

- 변 경 : 2015. 10. 30.

4. 귀책소재 : 서울특별시

5. 연기사유 : 구리시 구간 기본계획 및 사업시행 방안 등에 대한 국토부, 구리시와 협의기간 추가 소요에 따른 과업기간 연기

붙 임 : 1. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

2. 준공기한 연기 방침서 1부.

3. 용역계약 변경 합의서 1부. 끝.

	도로계획과장
주무관	정재훈		광역도로계획팀장	최연호		도로계획과장	09/07 최동필
협조자
시행	도로계획과-434	(		)	접수		(		)
우			/
전화	2133-8089	/전송	2133-0763	/	1007jjh@seoul.go.kr	/	대시민공개