문서번호	방재시설부-11967
결재일자	2015.9.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김학지		이도헌	09/07 임춘근
협조

공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

토공수량 수정 및 풍화암 굴착방법 변경 검토보고

2015. 9

도시기반시설본부

(방재시설부)

공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

토공수량 수정 및 풍화암 굴착방법 변경 검토보고

공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사와 관련하여 서울시시설관리공단으로부터 펌프장 토공수량 수정 및 풍화암 굴착방법 변경에  대한 현장실정 보고사항이 있어 이에 대한 검토 보고임

사업개요

❍ 공 사 명 : 공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

❍ 규    모

- 공릉2빗물펌프장 : 토출용량 Q=520㎥/분, 인입관거 412m

- 면목4동 배수관로 : 강관추진 52m, 배수관로 설치  380m

❍ 사업기간 : 2013. 1. 8 ∼ 2015. 12. 31

❍ 감리사/시공사 : 서울시시설관리공단/(주)승영기술공사외 1개사

❍ 도 급 비 : 6,732백만원

실정보고 및 검토내용

❍ 보고내용

- 펌프장 토공 수량에 대한 설계서 토적표 검토 중 측점별 누가거리 오류로 인한 토공량이 과다하게 산출되어 있고

- 풍화암 굴착시 당초 설계가 브레이커 깨기로 되어 있어 토공작업시 소음 및 진동에 대한 민원발생이 우려됨

※ 가시설 공사중 진동 및 소음민원이 발생된 현장임

- 또한 동부간선도로측 옹벽에서부터 굴착면 상단까지 경사면으로 처리토록 설계되어 있으나. 점검통로 등이 없어 계측관리 등 가시설 관리에 어려움이 많음

❍ 검토내용

- 펌프장 토공수량 오류에 대하여 용역사(도화엔지니어링)에 의견조회결과토적표에 오류가 있음을 확인하였고

(도화수자원-2015-A20-0627,‘15.8.25)

- 기 시공된 가시설공사중 진동 및 소음 등으로 민원이 발생된 현장으로 당초 설계되어 있는데로 시공시(브레이카깨기) 민원발생이 예상되는바.   풍화암 굴착공법을 변경하여 시공함이 필요함

- 동부간선도로측 옹벽에서 굴착 작업장까지 이격거리가 짧고 점검통로등이 없어 계측기설치(경사계, 지하수위계)등 관리에 어려움이 많은바.  안전사고 예방 및 작업통로로의 활용을 위해 굴착면을 정리하여 관리 하고자 함

- 수량 및 공사비 집계표

· 토공오류 수정

항 목	공 종	수 량		증 감	개략공사비 (단위:천원)
		당 초	변 경
토공오류수정 (경사면포함)	터파기	12,823	8,459	감)4,364	감)110,300
풍화암굴착	브레이카깨기	1,662	-	감)1,662	감) 35,435
	천공+할암	-	1,662	증)1,662	증)231,781

- 개략공사비 : 증) 약139,821천원(제경비 포함)

감리검토내용

❍ 용역사의 토적표 연장 오류로 인한 토공은 수정함이 타당하고

❍ 풍화암 굴착시 소음과 진동에 의한 민원을 사전에 예방하기 위해서는 풍화암 굴착공법의 변경(브레이카깨기 → 천공 + 할암)이 필요함

❍ 작업장내의 점검통로 및 작업통로의 활용을 고려하여 옹벽에서 작업굴착면까지는 흙깍기 후 작업장으로 사용이 필요함

보고자 의견

❍ 상기내용을 검토한 결과 서울시시설공단 위탁감독이 제출한 현장실정 보고사항이 적합한 것으로 판단되어 승인조치하고자 함.

붙임 : 1. 현장실정보고 검토서 1부.

2. 관련서류 1부.

3. 용역사 공문 1부.끝.