보고서 (급수공사 작업기한 연기)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
박상열	김태형	09/07 최명익
협 조

문서번호 :	급수운영과-23487

광진구 상수도공사 감독업무 수행(***********급수공사) 중 아래와 같은 사항이 발생하여 보고합니다.

2015. 09. 07.

보고자 : 직  지방시설주사보   성명 : 박 상 열

제목 : 급수공사 연기 보고

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2015년 광진구 상수도공사(장기계속공사)

연번	주 소	수요가명	공사기간	지시번호	비 고
1	*********	***	`15.08.25.~09.07.	신설-150
			이하여백

□ 연기요청사항

연번	주 소	수요가명	연기요청 사유	공사연기 기간	요청인
1	*********	***	타공정 지연(비계철거)에 따른 연기	`15.09.16.	정옥면
			이하여백

□ 검토결과

○ 수용가측 요청에 의한 굴착 일정 조정으로 공사기간내 공사가 어려워 아래와 같이 연기하고자 합니다.

연번	주 소	수요가명	당초 공사기간	변경 공사기간
1	*********	***	`15.08.25.~09.07.	`15.08.25.~09.07.
			이하여백

□ 귀책사유 : 동부수도사업소

□ 지체상금 부과여부 : 미부과.  끝.