문서번호	설비부-11015
결재일자	2015.9.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	건축설비과장
배수웅	09/07 김영수

『서남권야구장주변 보행자전용도로 설치 전기분야』

설계변경 소위원회 자문요청

2015. 9.

설  비  부

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호	설비부-	요청부서	건축설비과	요청일	2015. 9. .
공 사 명	서남권 돔야구장 주변보행자 전용도로(보행광장)설치공사(전기)
감리개요	공사규모	- 지하차도 조명 392등, 배전반 1면, 보행광장 조명(보행등 129등), 분전반 2면, 기타 1식
	공사기간	2013년 05월 27일 ~ 2015년 09월 20일
	감 리 사	㈜삼보기술단(전기- ㈜무림설계기술단)
	설 계 사	㈜동일기술공사, ㈜천일
	시 공 사	유신전기건설㈜, 대일전기통신(주)
심의요청 사 유	∘ 5,000만원 이상 설계변경
<설계변경 사유> ○ 발주처 및 유지관리부서 요구에 따른 물량 변경 등 - 재방송설비, 동선 유도등 등 삭제 - 야간작업에 따른 노무비 증가
주 요 변 경 내 용
○ 보행광장 보행등 변경 및 경관조명 보행자 동선유도등 삭제 ○ CCTV 물량 및 내역조정 ○ 고척2지하차도 Cable 및 Cable Tray 물량조정 ○ 고척2지하차도 야간작업 노임할증 ○ 관리주체 요구사항 반영
별첨서류	설계변경 심의자료 1부(별첨)

건 명 : 서남권돔야구장주변보행자전용도로설치 전기공사

■ 현 황

계 약 명	서남권 돔야구장 주변보행자 전용도로(보행광장)설치공사(전기)		시 공 자	유신전기건설㈜ 대일전기통신㈜
공 사 규 모	지하차도 조명 392등, 배전반 1면, 보행광장 조명(보행등 129등), 분전반 2면, 기타 1식	계 약 금 액	1,042,178,720원			계약일
						2013.05.27
공사기간	2013.05.31. ~ 2015.09.20.	감리자	(주)무림설계기술단		설계자	상진기술엔지니어링(주)
계약형태	기타( ), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사( )				※ 작성자: 배수웅 ☎ 3708-8626

■ 설계변경 개요

공 종	주요자재 변경내용		증 감	비고
	당 초	변 경
전기공사	○ 고척2지하차도 - 터널조명 Cable 및 Tray - 전기실 전등(신설) - 수변전설비 인입 Cable - 라디오재방송 - 침수경보설비 - CCTV 교체설비공사 - 원격제어반 설비공사 ○ 보행광장 - 보행광장 및 경사로 보행등공사 - 보행광장 경관조명공사 - 보행광장 동선유도등공사 - 엘리베이터 전기설비공사 - CCTV 설비공사 - 측부도로 조명설비공사 ○ 제경비 ○ 1차 ESC	○ 고척2지하차도 -터널조명 Cable 및 Tray -터널조명 시공 할증 -전기실 전등 (신설) -수변전설비 인입 Cable (변경) -라디오재방송 (삭제) -침수경보설비 (삭제) -CCTV 설비업체공사분 -전선관 노출배관 및 거리증설 ○ 보행광장 -보행광장 및 경사로 내역 정리 -경관조명 삭제 삭제 -동선 유도등설비 삭제 -전선관 노출배관 및 거리증설 -케이블 및 전선관 실거리적용 -전원공급 신설	증 41,969,182 증 7,419,074 감 13,324,938 감 47,211,020 감 24,641,474 감 631,416 증 334,982 감 622,831 감 6,302,484 감 16,158,690 증 898,273 감 65,061,843 증 5,462,361 감104,097,134 증 35,718,181

■ 설계변경 배경

○ 발주처 및 유지관리부서 요구에 따른 물량 변경 등

- 재방송설비, 동선 유도등 등 삭제

- 야간작업에 따른 노무비 증가

■ 설계변경 세부내용

구 분	내 용	선택 항목
설계변경 유형	① 설계도서 내용 불투명, 누락, 오류. 상호모순 ② 지질, 용수 등 현장조건 상이 ③ 신기술, 신공법 적용 ④ 민원수용, 보수, 보강 ⑤ 피해 건물보상 ⑥ 정책, 계획 등 변경 ⑦ 구조형식변경 ⑧ 제도, 기준변경 ⑨ 운반거리변경 ⑩ 유관기관요청 ⑪ 물가변동에 따른 계약금액조정	① ⑥ ⑧ ⑩
계약금액 조정 (단위 : 천원)	① 증액 : 천원 ② 감액 : 186,250천원 ③ 공사비 변경없음( )	②
설계변경 효과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편의증진, ⑦ 민원해소 ⑧ 설계구조보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진	⑥ ⑦ ⑨

■ 설계변경 경위

○ 계약금액 조정경위

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조 및 공사계약

일반조건 제7절의 1에 의거 계약금액 조정

○ 설계변경 승인절차

- 설비부 설계변경소위원회(계약금액 조정심의) ➞ 설계변경 ➞ 변경계약 ➞ 공사시행