문서번호	공간정보담당관-9793
결재일자	2015.9.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공간정보개발팀장	공간정보담당관
최지혜		김태준	09/07 조봉연
협조

2015년 항공사진 서비스 기능개선 사업 주간업무(9월1주) 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
공간정보 담당관-4594				142,560천원

2015. 09.

공간정보담당관

(공간정보개발팀)

2015년 항공사진 서비스 기능개선 사업

주간업무(9월 1주) 보고

사업명			2015년 항공사진 서비스 기능개선 사업
사업기간			`15.08.04. ~ `16.01.31.	서울시담당		공간정보담당관 최지혜
사업비			142,560천원	업체/PM		㈜씨엠월드 컨소시엄 박철희 차장
보고기간			‘15.08.04.~‘15.08.28.	전체공정율		계획 6.2% / 실시 6.2%
주요내용			프로젝트 관리 계획 수립 2. 사용자 인터뷰 및 요구사항 분석 3. 착수보고회 준비
주간 업무 보고
Part	금 주 실 적 (2015.08.31 ~ 2015.09.04)				차 주 계 획 (2015.09.07 ~ 2015.09.11)
사업관리	1. 프로젝트 관리 계획 수립 - 개발/관리 산출물 테일러링 2. 착수보고 - 착수보고 자료 준비				1. 착수보고 - 착수보고 수행 2. 프로젝트 관리 계획 수립 - 개발/관리 산출물 테일러링
시스템 개발	1. 사용자 인터뷰 - 시스템 개발 기능 인터뷰 - 항공사진 시민서비스 디자인 개선 인터뷰 2. 요구사항 분석 및 정의				1. 사용자 인터뷰 - 시스템 개발 기능 인터뷰 - 항공사진 시민서비스 디자인 개선 인터뷰 2. 요구사항 분석 및 정의
DB구축	1. 투영원점 변경에 따른 좌표변환 - 자료입수 목록 분석				1. 투영원점 변경에 따른 좌표변환 - 변환 목록 대상 정리 및 분석
산출물/ 별첨자료	○ 주간보고서 1부.
협조사항
對 서울시
對 용역업체
기타