문서번호	기전과-28
결재일자	2014.1.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
호정오		전결 01/02 장경옥
협조
	주무관		구희천

2013년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가-2지역 5차)

현장 실정보고사항 검토 보고

2014.  01.

서부도로사업소

[기 전 과]

2013년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가-2지역 5차)

현장 실정보고사항 검토 보고

2013년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가-2지역 5차) 업무수행중에 감리업체가 제출한 작업지시 현장 실정보고 사항에 대하여 내용을 검토하고 아래와 같이 결과를 보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 2013년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가-2지역)       제5차 작업 현장실정 보고

○ 대영유비텍(주) 대영전기감13A-12-46(2013.12.31.)호

Ⅱ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 2013년 교통신호기 신설 및 보수공사

(연간단가-2지역)

□ 공사위치 : 서부도로사업소 관내(마포구, 은평구)

□ 계약금액 : 금685,993,000원(금육억팔천오백구십구만삼천원)

□ 공사기간 : 2013. 03. 20. ~ 2014. 02. 28.

□ 계약업체 : 성산전설㈜ 대표 조 희 성

□ 감리업체 : 대영유비텍(주)

Ⅲ		2차 작업지시 개요

□ 작업위치 : 은평구 응암오거리 외 76개소

□ 작업지시금액 : 금219,296,000원(금이억일천구백이십구만육천원)

□ 작업내용 : 교통신호기 신설, 이설 및 교체 1식

□ 작업지시기간 : 2013. 11. 25. ~ 2014. 1. 13.

Ⅳ		실정보고 내용 및 검토결과

공사장소	변 경 내 용	검토결과
홍대입구역 외 30개소	음향신호기를 음량자동조절형에서 필요시 현장에 여건에 맞게 음량자동조절형으로 변경이 가능한 음향신호기로 변경설치	타당
수색역교차로	주변 노후지주 1본 추가교체 및 불필요한 LSU 설치제외	타당

□ 변경예상금액 : 감)약15백만원

○ 현장실정 보고 붙임 참조

Ⅴ		조 치 의 견

□ 감리업체의 실정보고 내용이 타당하므로 감리업체에 우선 변경하여 작업토록 지시하고 추후 완료보고 시에 정산물량 반영하고자 함

붙임  감리업체 현장실정 보고 1부.  끝.