문서번호	토목부-18782
결재일자	2015.9.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장
이한규	진재섭	09/08 노우성

터널형 방음벽 점검시설 설치 검토보고 (남부순환로 개봉역앞 구조개선공사)

2015. 9.

도시기반시설본부

(토 목 부)

터널형 방음벽 점검시설 설치 검토보고

- 남부순환로(개봉역앞) 구조개선공사 -

터널형 방음벽 상부에 점검 및 유지관리 등을 위해 시설물 인수부서인 강서도로관리사업소에서 점검시설 요청이 있어 이에 대한 검토보고임.

관련근거

○ 터널형방음벽 상부 점검통로 설치요청 (시설보수과-951호, ‘12. 2.17.)

○ 터널형방음벽 상부 점검통로 설치 재요청 (교량보수과-5307호, ‘13. 7.18.)

○ 터널형방음벽 상부 점검통로 설치와 관련한 검토의견 회신 요청

(토목부 → 도로시설과, 토목부-15304호, ‘13. 7.21.)

○ 터널형방음벽 상부 점검시설 설치 등 검토의견 제출(시설보수과-5641호, ‘15. 7.23.)

공사개요

○ 위 치 : 구로구 개봉동234-1 ~ 198-1(개봉역 일대)

○ 규 모 : 지하차도 설치 폭4차로, 연장 736m

- 남·북측 측도설치 : 폭 2 ~ 3차로, 연장 2,280m

○ 사업기간 : 2007. 9. ~ 2015.10.31.

○ 총사업비 : 668억원

○ 도 급 사 :(주)케이에스씨건설외 1사

검토

○ 시설물 인수부서인 강서도로관리사업소에서는 터널형 방음벽 상부에 점검 및 유지관리 등을 위해 점검시설을 지속적으로 요구

○ 이에 따라 유지관리부서 및 도로시설관리 부서에 터널형방음벽이 유지관리에 꼭 필요한지 여부에 대해 재협의 결과 유지관리부서에서는 재설치 요구하고 있음.

※ 서울시 도로시설관리부서에서는 유지관리부서로 관련서류 이첩

○ 구조 기술지원감리원 검토의견

구분	검토자	검토 의견	비고
터널형방음벽 상부 점검시설	설계자 구조기술사 고점배 (SE2013-91호2013. 5.29.)	- 점검시설 설치시 철재시설물로 인한 시각적인 문제점 및 지상으로부터 인근 주민의 접근 가능성으로 안전사고 우려 됨.
	구조 기술지원기술자허동녕 (감리제15-142호, 166호)	- 점검통로와 터널형방음벽 H형강 접속부에 대한 연결방식과 안전성 검토내용이 없음(1차의견) - 지적사항 보완분 검토결과 의견없음(2차의견)

○ 수량 현황

구분	위치	설치수량	설치규격	형식	비고
터널형 방음벽 상부 점검시설	시점부	152.7m	SUS 점검시설 W3.0 x B1.20m x H1.20m	접이식	강서도로 사업소 교량보수과 요구사항
	종점부	152.7m	SUS 점검시설 W3.0 x B1.20m x H1.20m	접이식
	계	305.4m	102경간
점검시설 사다리	시점부	1개소	SUS 사다리 H=6.0m(잠금시설포함)	상하행식
	종점부	1개소	SUS 사다리 H=6.0m(잠금시설포함)	상하행식
	계	2개소

자재비 단가 검토

○ 상부점검통로 난간 제작설치 견적대비표

규 격	구 분	표준품셈 기준	업체별 견적 대비표(3m/경간당)			비고
			에코플랜	(주)무한건설	GNS
터널형방음벽 상부 점검시설 제작 설치(접이식) W=3.0xB=1.20x H=1.2m	자재비	1,159,167	1,196,896	1,432,775	1,391,118	견적서 참조
	노무비	945,048	903,689	808,600	903,631
	경 비	50,672	120,000	65,000	150,000
	합 계	2,154,887	2,220,585	2,306,375	2,444,749
협의율 적용(82.868%)		1,785,710	1,840,154	1,911,246	2,025,914
적용단가		◎

○ 점검통로 사다리 제작설치 견적대비표

규 격	구 분	표준품셈 기준	업체별 견적 대비표			비고
			에코플랜	(주)무한건설	GNS
사다리 제작 설치 H=6.0m	자재비	539,912	601,808	653,010	748,026	견적서 참조
	노무비	617,316	696,537	875,500	594,722
	경 비	33,099	500,000	650,000	750,000
	합 계	1,190,327	1,798,345	2,178,510	2,092,748
협의율 적용(82.868%)		986,398	1,490,252	1,805,287	1,734,218
적용단가		◎

○ 신규단가 검토

구 분	공 종	단위	단 가	단가산출기준	비고
설계변경 시점	-2014년 12월 기준
신규단가 적용공종 (협의율) 82.868%	점검시설 설치(접이식) W3.0 x B1.20m x H1.20m	경간	1,785,710	①제작설치비 - 시공비 : 표준품셈 적용 - 자재비 : 2014년12월 기준 정보지 조회후 최저가 적용 ➁적용단가 산출 [산출단가x혐의율(82.868%)]
	사다리 설치(H=6.0m)	개소	986,398

※ 신규단가는 공사계약일반조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액조정) ②항에 의거

설계가에 협의율(강제) 82.868%적용(65.736%+ 100% / 2 = 82.868%)

공사비 증․감

(단위 : 원)

공 종	규 격	단위	수량	단가	공사비	비고
1.터널형방음벽 상부 점검시설 설치
-점검시설 설치	(W=3.0m x B=1.2m x H=1.2m)	경간	102	1,785,710	182,142,420
-사다리	사다리 설치 (H = 6.0m)	개소	2	986,398	1,972,796
직접공사비					184,115,216
제경비					28,574,784
공급가액					212,690,000
부가가치세					21,269,000
도급공사비					233,959,000

감리단 검토 의견

○ 시설물 인수부서의 시공중 운영부서 합동점검 결과 지하차도 유지관리부서인 강서도로사업소에서는 터널형 방음벽 상부에 점검통로는 방음시설 수시점검 및 청소등 향후 유지관리를 위하여 설치 요청에 따라 설치하는 것이 타당하다고 판단됨.

○ 증액되는 공사비 233,959천원에 대하여는 본부 승인 후 설계변경심의위원회 심의 결과에 따라 설계변경에 반영하고자 함.

조치계획

○ 터널형방음벽 상부에 점검시설 설치에 대하여 감리단 검토의견과 같이 승인하고 증액되는 공사비(233,959천원)에 대하여 추후 설계변경소위원회 심의결과에 따라 설계변경에 반영하고자 함.

붙 임  :  감리 검토의견서 1부.  끝.