문서번호	누수방지과-31
결재일자	2014.1.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	시설관리부장
박종일	김도섭	01/02 윤석우

'14년 배급수관정비 사업계획 심사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.01

시 설 관 리 부

(누수방지과)

’14년 배급수관정비 사업계획 심사결과 보고

’14년도 배급수관정비(세척갱생관 및 흑PE관) 사업계획을 심사하고 그 결과를 보고 드림

□ 심사개요

○ 정비목표 : 39㎞(세척갱생관 30㎞, 흑PE관 9㎞)

○ 사 업 비 : 26,662백만원(총사업비 28,210백만원)

○ 심사기간 : ’13.12.27 ~ 12.30

○ 사업소별 정비계획 및 소요예산(감리비1,540백만원, 부대비 8백만원 별도)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
발주대상(건수)	23	4	4	4	2	3	2	2	2
정 비 계 획(㎞)	39	6.63	8.28	4.9	2.6	3.3	5.87	4.34	3.08
소요예산(백만원)	26,662	4,932	4,563	3,749	1,989	2,555	3,724	2,823	2,327

□ 심사결과

○ 부설계획 관경 적정성 검토          : 6개소

○ 사업대상에서 제외                  : 2개소

○ 블록내 단절관등 배관 환경정비 검토 : 53개소

○ 단일배관이중화 검토                : 5개소

○ 누수다발관로 정비 검토             : 14개소

○ 노후인입관 정비 검토               : 3개소

□ 향후 계획

○ 설계도면(상세도) 심사 : ’14.1.20 ~ 1.23(4일간)

- 주요 검토사항

․ 단위사업 심사결과 검토사항 설계 반영여부

․ 제수밸브 등 상수도시설물 적정위치 반영여부

․ 장기 재고자재(자재센터) 설계반영 여부(설계 누락 및 미반영시 재심사)

○ 계약심사 및 발주 : ’14. 2.14일 까지

○ 공사착수 : ’14. 3. 3

첨부 :  공사별 검토사항(심사결과) 1부.  끝.