실무관 야간업무일지
문서번호 :	도로보수과-8833	결재	공무직	주무관	도로보수과장
접수번호 :			신원순	최완	09/08 이석재
시행일자 :
수 신 자 :	내부결재

□ 일시 : 2015. 09. 05(토)

□ 내용 : 관내 굴착복구 현장별 야간감독

현장감독시간: 2015년 09월05일 22:00~익일06:00

금일 업무 수행사항	현장지시사항	비고
1.청계천로 - 굴착위치: 센트럴관광호텔앞 - 굴착허가번호: 종로구-2015-상수-00059 - 공사명: 청계2가~청계5가교차로 송배수관 정비공사 - 굴착원인자: 중부수도 사업소 시설관리과 - 포장복구자: 관리청 년간단가업체 - 규모:폭 1.2m 연장: 1100m중900m완료 금일굴착:40m 누계940m 2.종로 - 굴착위치: 탑골공원앞 - 공사명: 탑골공원앞~종로구청간 송배수관 정비공사 - 굴착원인자: 중부수도 시설관리과 - 포장복구자: 관리청 - 규모:폭 1.2m 연장: 980m중 770m완료 금일굴착:20m 누계790m 3.안감내길 - 굴착위치:돈암시장앞 - 굴착허가번호: 성북구-2015-상수-00060 - 공사명: 보문동2가3~134호간외4개소배급수관공사 3구간 - 굴착원인자: 중부수도 사업소 시설관리과 - 굴착시공자: 삼정건설(주) - 포장복구자: 관리청 년간단가업체 - 규모:폭 1.2m 연장: 210m중50m완료 금일굴착:50m 누계50m	-특이사항 없슴 -특이사항 없슴 -굴착구간내 하수관로 이음부파손부위 보수 완료후 작업할 것 -현장소장 보수완료

교통신호수배치완료및교통안내시설.공사안내간판확인점검: 양호	굴착심도점검: 상수도관상단 1.3m굴착:양호

상수도관 상단 모래포설후 람마다짐 점검현황	보조기층재 포설작업 현황

중층가복구 포장완료후 신.구접합부 유제 재살포점검	중층 가복구 완료현황