문서번호	물재생과-5960
결재일자	2015.9.8.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
박승필		강병수	09/08 김동기
협조
	주무관		김희태

침사인양기 실정보고 및 조치계획 검토

2015. 9

중랑물재생센터

(물재생과)

침사인양기 실정보고 및 조치계획 검토

우리센터 단위사업인『제3처리장 침사인양기 부품 제작구매 설치』관련하여 현장 실정 사항에 대한 조치 계획을 검토 보고 드림.

Ⅰ		사 업 개 요

건    명 : 침사인양기 부품 제작구매 설치

계약금액 : 262,900천원

구매개요 : 3처리장 3,9,12호 침사인양기 노후부품 교체 사업

계 약 자 : ㈜디케이엠엔이

Ⅱ		보 고 내 용

실정보고

○『침사인양기 부품 제작구매 설치』작업중 계약 내역에 없는 파손부품이 발견되어 교체 작업에 지장을 초래하고 있는 사항임.

상부아이들

하부아이들

침사인양기(3호) 파손부품 현황

○ 상부아이들 : 스프라켓 마모.

○ 하부아이들 : 축, 메탈박스 파손, 칼라, 부싱 메탈베어링 마모

상부아이들 - 스프라켓 마모	하부아이들 - 축, 메탈박스 파손, 칼라, 부싱, 메탈베어링 마모

침사인양기(9호) 파손부품 현황

○ 상부아이들 : 축파손, 스크라켓 마모.

○ 하부아이들 : 메탈박스 파손

상부아이들 - 축파손, 스프라켓 마모	하부아이들 - 메탈박스 파손

Ⅲ		검 토 내 용

○ 현 공사에 파손 부품을 교체하지 않을시 추가 공사로 인한 부대경비가 발생하는 사항이며.

○ 침사인양기 설비의 가동 정지 기간 증가에 따른 하수처리 수질저하등 문제점이 있음.

Ⅳ		조 치 계 획

○ 침사인양기 추가 파손 부품을 긴급구매하여 현 공사업체에 철거설치 의뢰

○ 침사인양기 부품구매

- 축 : S45C 2개

- 스프라켓 :FCD50 : 4개

- 메탈박스 : FCD20 4개

- 칼라 : SS400 4개

- 부싱 : STS304 2개

- 메탈베어링 : BC3 2개

○ 견적 가격이 저렴하고 긴급구매 가능한 경원기공에 긴급구매

Ⅴ		행 정 사 항

○ 소요예산 : 8,756천원

○ 계약방법 : 수의계약

○ 계약업체 : 경원기공

○ 계약사유 : 침사인양기 설비 가동을 위한 긴급구매

○ 구매기간 : 20일

○ 예산과목 : 한강수질개선특별회계, 깨끗한물관리, 한강수질개선, 환경기초수질개선, 재료비

붙임 : 견적서 1부.