투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 계약 의뢰 (서부이촌동 보행육교 설치공사 실시설계용역)

1. 기반시설과-857(2015.9.8)호와 관련입니다.

2. “서부이촌동 보행육교 설치공사 실시설계용역” 의 준공기한을 다음과 같이 연기 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역현황

- 용 역 명 : 서부이촌동 보행육교 설치공사 실시설계용역

- 용역기간 : 2015. 3. 23 ~ 9. 18

- 도 급 액 : 금112,625,400원

- 도 급 자 : ㈜동해종합기술공사 대표 정점래

나. 준공기한 연기

계약일	착수일	준 공 기 한		비 고
		당 초	변 경
‘15.3.23	‘15.3.23	‘15.9.18	‘15.10.30

다. 연기사유 : 서울시 좋은빛위원회 심의 진행중으로 심의결과 설계 반영과 1차 기술자문 내용을 반영한 한강둔치 교각 신설에 따른 서울지방국토관리청 협의 진행중으로, 협의내용 설계 반영에 따른 추가 기간 소요

첨부  1. 방침서 1부.

2. 관련문서 및 합의서, 예정공정표 1부.  끝.

	기반시설과장
주무관	박중모		주무관	조운행		기반시설과장	09/09 한흥태
협조자
시행	기반시설과-869	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가 642-25)	/
전화	3780-0674	/전송	3780-0744	/	p05480548@seoul.go.kr	/	대시민공개