문서번호	기전과-8891
결재일자	2015.9.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	동부도로사업소장
김동현		남궁영주	09/09 임대성
협조
	주무관		이귀섭

『2015년 교통안전시설(안전표지)유지보수공사』

낙찰차액 사용계획 및 설계변경 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 9

동부도로사업소

(기전과)

『2015년 교통안전시설(안전표지) 유지보수공사』

낙찰차액 사용계획 및 설계변경 보고

2015년 교통안전시설(안전표지) 유지보수공사(연간단가)의 원할한 사업추진을 위하여 낙찰차액을 사용하고자 함.

관련근거

○ 2015년 교통안전시설 예산집행 철저

: 교통운영과-17116호(2015.09.03)

공사개요

○ 공 사 명 : 2015년 교통안전시설(안전표지) 유지보수공사(연간단가)

○ 공사개요 : 교통안전표지 유지관리

○ 공사기간 : 2014.03.06. ~ 2015.12.31

○ 계약금액 : 80,181천원

○ 계 약 자 : 제일공영(주) 추인옥

공사추진 현황 [2015. 09. 08 기준]                          (단위:천원)

구 분	계약금액	작업완료 금액 (4차완료 누계금액)	작업완료 잔액	비 고
교통안전표지 1~4차 작업지시	80,181	77,615	2,566	5차 작업 예정금액 (6,000천원)

예산 현황                                             (단위 : 천원)

연번	공사명	발주금액	계약금액	집행잔액 및 낙찰차액
				계	집행잔액	낙찰차액
1	2015년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)	90,000	80,181	9,819	-	9,819
2	이전비 (굴착복구비)	2,000	282	1,718	1,718	-
	합 계	92,000	80,463	11,537	1,718	9,819

예산사용 계획

○ 잔여 예산금액 : 11,537천원 (집행잔액 : 1,718천원 + 낙찰차액 : 9,819천원)

○ 사용계획

- 집행잔액 및 낙찰차액을 사용하여 설계변경 후 5차 작업지시

보고자 의견

○ 상기와 같이 예산집행 계획에 따라 설계변경을 시행하여 교통안전표지 유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 관련 공문 1부.  끝.