함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(배수과장)
(경유)
제목	동일로 송배수관정비공사 공사비 추가배정 요청

1. 우리사업소에서 시행중인 『동일로 송배수관정비공사』와 관련입니다.

2. 본 공사 시공 중 설계변경사항 발생으로 추가공종에 따른 공사비 증액이 요구되어 공사의 원활한 진행과 집행을 위하여 아래와 같이 증액공사비 추가배정을 요청하오니 검토 후 처리하여 주시기 바랍니다.

☞ 공 사 현 황

○ 공 사 명 : ********************

○ 공사개요 : **********************************************

○ 공사기간 : *************************

○ 도 급 비 : ***********

○ 시 공 자 : **************

○ 추가공종 : 지장물하월 2개소 추가 및 굴착폭 확폭 등

○ 증액공사비 : *********(추가배정 요구금액)

붙임 : 1. 공사비 증액 실정보고서 1부.

2. 공사비 산출내역서 3부. 끝.

	동부수도사업소장
주무관	최호림		급수설비팀장	代양윤선		급수운영과장	09/09 최명익
협조자
시행	급수운영과-23703	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2742	/전송	02-3146-2789	/	tig2r2000@seoul.go.kr	/	부분공개