서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	창신두산아파트 입주자대표회의
(경유)
제목	에너지자립마을 사업계획 변경 승인(창신두산아파트)

1. 창신두산아파트-1(2015.09.08)호와 관련입니다.

2. 귀 단체(마을)에서‘15년 에너지자립마을 조성사업 계획에 대한 내용 변경을요청하여 아래와 같이 승인하오니 사업추진에 만전을 기해 주시고, 아울러 보조금관리시스템 세부사항 변경과 보조금 정산 및 자부담 예산집행에도 철저를 기해주시기 바랍니다.

〇 사 업 명 : 에너지 절약 실천으로 자립기반 조성

〇 총사업비 : 2,237.9만원(보조금 2,010.4만원, 자부담 227.5만원)

〇 변경승인 내용(보조금 총액 동일)

- 미니태양광 수요 반영 및 교육용 태양광 설치규모 축소로 감액(419만원)

- 에너지진단사 양성사업(신설) 및 커뮤니티 활동사업 확대로 동액 증액

〇 변경사업비 승인내역

<보조금>

(단위: 원)

예산비목	당초예산(A)	변경예산(B)	증감(B-A)	변경예산 산출내역
	18,004,000	18,004,000	0
시설공사비	12,210,000	8,700,000	감 3,510,000	-교육용태양광 2kW->1kW 변경 (251만원) -미니태양광 33세대->23세대 (100만원)
물품취득비	1,830,000	1,150,000	감 680,000	-자부담으로 전환
홍보인쇄비	289,000	339,000	증50,000	-현수막 50,000×1개
소모성물품 구입비	2,340,000	6,180,000	증3,840,000	커뮤니티수업재료비 - 불끄기날 양초 만들기(212만원) - 친환경샴푸 만들기 250,000×2회 - 재활용정원 만들기 220,000 에너지절약경진대회시상품(100만원)
식비	735,000	835,000	증100,000	식대 7,000원×4명×4회
활동비성경비	600,000	800,000	증200,000	에너지진단사양성교육비 - 50,000×4명

<자부담>

(단위: 원)

예산비목	당초예산(A)	변경예산(B)	증감(B-A)	변경예산 산출내역
	1,890,000	1,890,000	0
소모성물품구입	400,000	0	감400,000
시설공사비	1,490,000	1,210,000	감280,000
물품취득비	0	680,000	증680,000	-교육용 미니빔프로젝트 구입 680,000×1대

끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	연흥모		에너지공동체팀장	김연지		에너지시민협력과장	09/09 정희정
협조자
시행	에너지시민협력과-8019	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화	02)2133-3587	/전송	02)2133-3580	/	yeonhm@seoul.go.kr	/	대시민공개