문서번호	시설관리과-19245
결재일자	2015.9.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	강서수도사업소장
서장원		이자원	09/09 이상래
협조
	주무관		손종백

'2015년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사'

설계변경(1차) 심의위원회 개최결과 보고

2015. 9. 9(수)

강서수도사업소

(시설관리과)

'2015년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사'

설계변경(1차) 심의위원회 개최결과 보고

우리사업소에서 시행중인 「2015년 강서구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수  공사」에 대한 1차 설계변경 심의위원회 개최 결과를 보고드림.

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 2015년 강서구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사

나. 공사개요 : 밸브교체 130개소, 변실정비 243개소, 배수지 유지관리 35개소

다. 공사기간 : 2015.  4. 7.~ 2016. 4. 30.

라. 계약금액 : 금683,022,340원(총부기금액)

마. 도 급 자 : 카본코리아(주)   대표 구본영

2. 심의일시 : 2015. 9. 9(수) 15:00(강서수도사업소 4층 회의실)

3. 설계변경 현황

가. 도급비 변경내역 (변동없음)

구 분	당초	변경	비 고 (증 ․ 감)
총공사비	833,022,340	833,022,340	변동없음
도 급 비	683,022,340	683,022,340
관급자재비	150,000,000	150,000,000

- 정산에 따른 차수별 금액 현황

구분	총부기금액(원)		1차분		2차분
	당초	변경	당초	변경	당초	변경
도급비	683,022,340	683,022,340	580,569,000	580,569,000	102,453,340	102,453,340

나. 설계변경사유

- 신규공종 발생 및 물량 증 ․ 감에 따른 설계변경 시행

․ 신규공종 : 안전사다리 설치(손잡이부착)외 27종

․ 물량증가 : 콘크리트포장절단(100~150㎜)외 32종

․ 물량감소 : 터파기(기계 0.4㎥) 불량외 56종

다. 주요공종 물량변경 내역

공 종	규 격	단 위	당초수량	변경수량	증ㆍ감
콘크리트 포장절단	100~150㎜	m	145	2145	증) 2000
KP이탈방지압륜접합공	80㎜	개소	98	148	증) 50
터파기(기계 100%)불량	0.4㎥	㎥	527	100	감) 427
제수밸브철거공	100㎜	개소	30	1	감) 29
손잡이부착식안전사다리설치	Ø648	개소		13	증) 13
원형밸브실설치공(기초재생PE)	150㎜	개소		20	증) 20

4. 심의 주요내용

가. 설계변경의 타당성

나. 신규공종에 대한 단가적용 적정여부

다. 공종별 물량 증 ․ 감 적용 적정여부

라. 제경비 적정산정 및 적용 적정성

마. 계약금액 조정(차수별 부기금액 변경) 등

5. 설계변경 심의결과

가. 설계변경 : 타당

나. 신규공종 단가적용 : 적정

다. 주요 공종 물량 증 ․ 감 사항 : 타당

라. 제경비 산정 적용 : 적정

마. 계약금액 조정(차수별 부기금액 변경) : 타당

6. 조치계획

심사결과에 따른 설계변경 시행 및 본청 재무과에 변경계약의뢰.

붙 임 : 1) 설계변경 계획서 1부.

2) 설계변경 내역서 1부.

3) 설계변경 심의결과서 1부.  끝.

작 성 자	시설관리과장 : 이자원 ☎3146-3990 시설물총괄 : 손종백 ☎3146-3994 담당 :서장원☎3146-4005