문서번호	방재시설부-12119
결재일자	2015.9.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
박계현		김인숙	09/09 임춘근
협조
	주무관		임성은

『경의선숲길 공원조성공사』원효동구간

공원 경계부 U형측구 개선 실정보고 검토 보고

2015. 09

도시기반시설본부

방재시설부

『경의선숲길 공원조성공사』원효동구간

공원 경계부 U형측구 개선 실정보고 검토

「경의선숲길 공원조성공사」 원효동구간 공원 경계부 U형측구 개선에

대한 건설사업관리기술단 실정보고 검토 보고임.

▶ 관련근거 : 경의경춘(감) 제2015–724(2015.09.04)호

Ⅰ

공사개요

○ 공 사 명 : 경의선숲길 공원조성공사(2단계)

○ 위    치 : 용산문화체육센터 ~ 가좌역

○ 규    모 : 공원조성 84,268㎡, L=3.48km

○ 사업기간 : 2013.9 ~ 2016.3

○ 공 사 비 : 12,244백만원

Ⅱ

검토내용

○ 실정보고 사유

① 공원경계부에 기 설치되어 있는 플륨관 160m 중 80m 가량이 침하 등       손상되어 우수처리가 원활하지 않음.

② 공원경계 외측에 설치되어 있는 PE관(L=40m)이 전반적 구배불량과 파손      등으로 배수기능 저하와 미관 저해

○ 개선방안

- 설치 상태가 양호한 플륨관(L=80m)를 제외한 잔여구간은 전면 철거 후      재 설치하여 원활한 우수처리로 향후 발생 가능한 민원과 피해를 미연에 방지

○ 주요수량 변경현황

구 분	규 격	단 위	당 초	변 경	증 감
U형측구	300*350	m	-	120	증) 120
터파기		㎥	-	112.8	증) 112.8
되메우기		㎥	-	67.2	증) 67.2
사토		㎥	-	45.6	증) 45.6
무근콘크리트깨기	T=30cm미만	㎥	-	13.2	증) 13.2
폐기물상차		㎥	-	13.2	증) 13.2
레미콘	25-21-12	㎥	-	23.63	증) 23.63
	25-18-8	㎥	-	9.79	증) 9.79
철근	D13	톤	-	1.730	증) 1.730

○ 공사비 검토

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
순공사비	-	6,926	증) 6,926
2. 제잡비	-	3,357	증) 3,357
3. 도급액	-	10,283	증) 10,283
4. 관급자재대	-	3,280	증) 3,280
5. 총사업비	-	13,563	증) 13,563

Ⅲ

건설사업관리기술단 검토의견

○ 원효동구간 공원 경계부 구배불량, 손상 등으로 배수기능 저하된 U형 측구에 대하여 개선(철거 후 재설치)하여 향후 발생 가능한 민원과 피해를 미연에 방지함이 타당하다고 판단되며, 수량 및 공사비(계약단가 적용)은 적절하게 산출된 것으로 판단됨.

Ⅳ

보고자 의견

○ 『경의선숲길 공원조성공사』 원효동 구간 공원경계부 U형측구 개선에 대한건설사업관리기술단의 검토의견이 타당하다고 판단되어 승인통보코자 하며 차후 설계변경 시 반영토록 조치하고자 함.

붙 임 : 건설사업관리기술단 실정보고서 1부.  끝.