문서번호	건축부-10395
결재일자	2015.9.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
지방시설사무관대우		의료시설과장	건축부장
신현성		김충범	09/10 안재혁
협조

『서울특별시 어린이병원』

삼성발달센터 관련 폐기물 설계변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시기반시설본부 건축부

『서울특별시 어린이병원』

삼성발달센터 관련 폐기물 설계변경 검토 보고

서울특별시 어린이병원 삼성발달센터 관련 지하구조물 등 추가발생으로 인한 폐기물 추가발생(터파기감소)실정보고에 대한 설계변경 검토 보고함.

□ 개요 및 추진사항

용 역 명 : 서울시 어린이병원 삼성발달센터 증축 공사 폐기물처리 용역

용역규모 : 폐기물 처리량  -  폐아스콘 447톤

폐콘크리트 4,825톤, 건축폐재류 840톤 , 혼합폐기물 164.52톤

용역기간 및 용역금액

- 총  차 : ’14.12.26~’17.01.31(167,259,900원)

- 1 차분 : ’14.12.26~’15.10.31( 30,000,000원)

계 약 자 :  ㈜ 벽성그린 산업 외 1

추진사항

-  ‘14. 12. 26  용역계약

-  ‘15.  7. 31   1차 용역 준공

-  ‘15.  8. 10   2016년 예산 증액 요청

□ 설계변경 보고 내용                                         ( 단위 : 톤)

연번	실정보고 내용					비고
	세부 사항		당초	변경	증.감
1	공원 지하구조물 존치로 철거물량 증가하여 폐기물량 추가 발생	1.구 본동 구조물 2.간호원 기숙사 구조물 3.폐수처리시설 구조물	-	1,320 (550㎥)	+1,320 (550㎥)	1.철거물량 추가 발생으로 철거공사 예정공정대비 30일 이상 지연 2.터파기시 발생된 폐기물량은 철거물량 제외 ≒ 2,041㎥ 3.추가발생 폐기물량의 사토발생량 감소 계상 (34,000㎥ -> 31,959㎥)
		옹벽 및 기초구조물	-	1,392 (580㎥)	+1,392 (580㎥)
		외부브릿지 연결통로 및 기초	-	108 (45㎥)	+ 108 (45㎥)
2	아스콘 포장 두께차이 폐기물량 추가 발생 -설계 12.5cm(457톤)↔ 현황 30cm		457 (194㎥)	917 (390㎥)	+ 460 (196㎥)
3	동측 외부 공원내 임시주차장 설치로 인한 폐기물량 추가 발생		-	31.2 (14㎥)	31.2 (14㎥)
4	구조물 철거와 관련 없이 터파기시 발생된 폐기물		-	2,080 (867㎥)	+ 2,080 (867㎥)
계			457 (194㎥)	5,848.2	+ 5,391.2 (2,252㎥)

폐기물 증가 사항                                       (단위 : 톤)

내 용	폐콘크리트	폐재류	혼합폐기물	폐아스콘
설계수량	4824.7	840	164.52	457
증 가 량	+5,544.28	+83.98	0	+101.14
현 물 량	1,0369.28	923.98	164.52	558.14

□  검토 사항

공사비 현황

구 분	공 사 비			비 고
	당 초	변 경	증 감
직접공사비	86,850,220	131,785,369	44,935,149	사토운반비 감소액포함 - 14,000,000 원
간접공사비	33,149,780	49,578,268	27,271,896
공급가액	120,000,000	181,363,637	61,363,637
부가가치세	12,000,000	18,136,363	6,136,363
도급공사비계	132,000,000	199,500,000	67,500,000
총공사비	132,000,000	199,500,000	+ 67,500,000
폐기물처리비	167,259,900	306,300,000	+ 139,040,100

건설사업관리단 검토의견

- 당해 공사의 터파기 공사 중 지하구조물 철거와 폐기물 추가발생 금액   139,040,100원 및 발생된 폐기물만큼 터파기시 발생된 사토반출량 감소 사토운반비 감액 계상은 적정한 것으로 판단

- 증가된 철거공사비(67,500,000원)는 설계변경시 반영토록 함.

폐기물 변경 상세                                          (단위 : 원)

구 분	용역비(원)		계약기간	비 고
	변경전	변경후
총 차	167,259,900	306,300,000	2014.12.26 ~ 2017.01.31	139,040,100증액
1 차	30,000,000	-	2014.12.26 ~2015.07.31	용역 준공
2 차	137,259,900	276,300,000	2015.09.10 ~ 2017.01.31	금회 발주

□ 처리의견

건설사업단 검토의견에 따라 실정보고 승인 하고 추후, 설계변경 심사를 거쳐서 철거 공사비를 확정하고자 함

(- 2016년 예산 추가반영 요청함 : 3억요청 터파기 및 폐기물처리비용 추가공사

- 2015년 배정예산 93억-공사 52억, 관급13억, 폐기물3.1억: 24.9억 여유)

폐기물증가 부분에 대하여는 설계변경 계약 등 2차 용역분 발주 하고자 함

□ 행정사항

실정보고 승인사항에 대하여 건설사업관리단에 통보

폐기물 증가 부분은 재무과에 계약 의뢰하고자 함

붙임  실정보고내용.  끝.