문서번호	교통운영과-17653
결재일자	2015.9.10.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		신호운영팀장	교통운영과장
권혁주		고광섭	09/10 강진동
협조

『교통신호제용 차량검지기』유지보수(연간단가)공사 예산잔액 사용보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.9.

교통운영과

(신호운영팀)

『교통신호제용 차량검지기』유지보수(연간단가)공사

예산잔액 사용보고

경찰청 2015년 교통신호제어용 차량검지기(앞막힘,앞막힘대기,좌회전감응 검지기)

확대 설치요청에 따라 설계물량이 증가되어 예산잔액을 활용하여 검지기 설치에

최선을 다하고자 보고 드림.

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 교통신호제어용 차량검지기 유지보수(연간단가)공사

❍ 계약업체 : (주)파워일렉  대표 이정림

❍ 사업기간 : 2015.3.24.∼2015.12.31.

❍ 계약번호 : 20150*******00

❍ 예 산 액 : 242,780,000원

❍ 계약금액 : 214,947,590원

❍ 예산과목 : 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물관리,

교통신호제어용 차량검지기 신설 및 보수, 시설비(201-401-01)

□ 관련근거

❍ 앞막힘 예방 신호 및 좌회전 감응 확대를 위한 검지기 설치 요청

서울특별시지방경찰청 교통관리과-18453(2015.07.03.)

❍ 앞 막힘 예방제어용 검지기 및 좌회전 감응검지기 확대설치 요청에 따른 물량증가

□ 신설내용

설치대상	앞막힘 검지기	앞막힘대기 검지기	좌회전감응 검지기
42개 교차로	을지로3가 외 13개	을지로3가역 외 9개	수협직판장 외 17개

□ 설계금액

(단위 : 원)

구 분	소요금액(설계금액)	집행잔액	부족금액
검지기 신설	201,453,000	173,620,590	27,832,410

□ 설계내역

연번	공 종	단위	총 설계물량	부족물량	비 고
1	검지기 시험,점검	개소	42	11
2	디텍터 신설	장	37	10
3	헤드8각 설치	ea	74	12
4	리드인 설치	m	686	119
5	측구리드인 배관	개소	41	11
6	휘더선/루프선 접속	조	75	12
7	휘더1선 신설	m	127	50
8	휘더2선 신설	m	118	0
9	휘더3선 신설	m	12	0
10	휘더1선 컷팅	m	681	179
11	휘더2선 컷팅	m	2,380	0

□ 보고자의견

❍ 교통신호제어용 앞막힘대기검지기는 차량정체 유무를 판단하고, 앞막힘검지기는

정체유무 판단에 따라 신호 제어역할을 함으로 1식으로 설치됨에 따른 물량증가

□ 예산현황

(단위 : 원)

구 분	예산액 (A)	계약금액 (B)	지출금액 (C)	예산잔액 (D=A-B)	집행잔액 (E=B-C)	사용가능예산 (F=D+E)
총액	242,780,000	214,947,590	41,327,000	27,832,410	173,620,590	201,453,000

❍ 추가소요금액 : 금27,832,410원

□ 향후계획

❍ 교통신호제어용 차량검지기 신설 시행보고 및 작업지시

❍ 2015년 교통신호제어용 차량검지기 계약금액 변경보고, 변경의뢰(재무과)

붙임 : 1. 차량검지기 추가물량 설계내역서 1부

2. 서울지방경찰청 검지기 신설요청 문서 1부.  끝.