문서번호	급수운영과-23892
결재일자	2015.9.10.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
최호림		김태형	09/10 최명익
협 조

설계변경 심의 위원회 개최결과보고

(2015년 광진구 상수도공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.09.

동부수도사업소

급수운영과

『2015년 광진구 상수도공사(장기계속단가계약)』

설계변경 심의 위원회 개최 결과보고

우리 사업소에서 시행중인 『2015년 광진구 상수도공사(장기계속단가계약)』 에 대한 설계변경 사전 심의 위원회를 개최하고 그 결과를 아래와 같이 보고함.

Ⅰ		공사현황

가. 공 사 명 : 2015년 광진구 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 공사기간 : 2015. 07. 06. ~ 2016. 06. 30.

다. 공사개요 : D=13~300mm, L=1,486m

라. 계약업체 : *************

마. 도 급 비 : ************

마. 물량증감 내역

- 부단수천공 분기점분기 400×40~50mm 신규공종

- 아스팔트 포장깨기(굴삭기0.2㎥ 브레이카) 외 5개 공종 물량증감

마. 계약금액 변경내역

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	비 고(증․감)
도 급 비	***********	***********	금액 변경없음
공급가액	***********	***********
부 가 세	**********	**********

Ⅱ		심의 위원회 개최사항

가. 개최일자 : 2015. 09 10.(목) 10:00

나. 개최장소 : 3층 회의실

다. 참석위원 : 급수운영과장 외 7명

라. 검토내용

- 신규공종 및 시공물량 증․감에 따른 설계변경 적정성 검토

마. 검토결과 : 위 검토내용에 대하여 적정하다는 심의의견을 제시함.

Ⅲ		향후계획

가. 상기와 같이 설계변경 심의 위원회 개최결과 심의위원 모두 적정하다고         의견을 제시하였으므로, 이를 설계변경 내역에 반영하여 본청 재무과에        변경계약 의뢰하고자 합니다.

붙임문서 : 1. 설계변경 심의 의뢰서 1부.

2. 심의위원회 의견서 1부.  끝.