투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	기반시설과장
(경유)
제목	변경계약체결통보 - 서부이촌동 보행육교 설치공사 실시설계 용역

1. 기반시설과-869(2015.09.09.)호 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 아래와 같이 계약이 체결되었음을 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

계 약 현 황	용 역 명	서부이촌동 보행육교 설치공사 실시설계 용역
	계약상대자	(주)동해종합기술공사 (대표 : 정점래)
	변경계약일자	2014.09.09
변 경 내 역	내 용	완수일자 변경, 계약금액 변경 없음
	변경사유	좋은빛위원회 심의 및 국토관리청 협의 반영에 따른 추가기간 소요
기 간 변 경	변경전 착수일자	2014.03.23	변경후 착수일자	2014.03.23
	변경전 완수일자	2015.09.18	변경후 완수일자	2015.10.30
금 액 변 경	변 경 전	112,625,400 원
	변경금액	-
	변 경 후	112,625,400 원

붙    임 : 변경계약체결통보서 1부. 끝.

	총무부장
주무관	심옥경		총무과장	최대봉		총무부장	09/10 이상국
협조자
시행	총무과-15498	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 한강사업본부	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/	imok@seoul.go.kr	/	부분공개