함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	『천호대로 확장(광나루역)현장 상수도관 3단계 이설 연결공사』관련 시․종점부 연결공사 추진일정 송부 및 업무협조 요청

1. 배수과-6260호(2015.9.3.) 및 천호수 제2015–439호(2015.9.9.)와 관련입니다

2. 위 대호와 관련하여 천호대로 확장(광나루역) 현장 상수도관 3단계 이설의 시․종점부 연결공사 요청에 대한 추진일정 및 관련부서 협조사항을 아래와 같이 송부하오니 이설공사 추진에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

◈ 상수도관 3단계 이설 추진일정

- 현장점검시 지적사항 보완조치	’15.9.10. 14:00

- 신설관로 담수 후 관상태 확인(누수 등)	9.10. ~ 9.13.

- 관세척 및 퇴수, 수질검사 시행(동부수도)	9.14. 10:30

- 종점부 이설관로와 기존관 연결작업	9.15. ~ 9.16.

(전구간 관로점검 및 관말 급수지역 수압체크 포함)

- 기존관 절관을 위한 라인스토핑 차단시행(2개소)	9.16. 10:30

- 기존관 절관 및 맹판설치 작업(공급관로 변경)	9.17. ~

- 기존관 철거 및 도로포장 시행(우회도로 형성)	9.20. ~

◈ 아차산3중블록 소출수 해소를 위한 연결관로 공사시행(긴급)

- 연결관로 : D500mm, L=10m

▶ 당초 D700mm로 연결관로 계획하였으나, 연결공간 부족으로 관경 축소(’15.9.10. 현장점검시 변경조치)

- 사업의 시급성(추석명절 이전 상수도관 이설 및 도로포장 완료)을 감안, 동부수도사업소에서는 9.20.(일) 이전까지 긴급공사 완료 조치

따로붙임 : 천호대로 감리단 협조요청 공문 1부. 끝..

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장),동부수도사업소장
주무관	김지환		배수과장	이임섭		급수부장	09/10 이규상
협조자
시행	배수과-6450	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개