투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	감리용역 변경계약 요청(총괄 17회, 12차 1회, 방화대교)

우리부에서 시행중인“방화대교 남단접속도로 건설공사 전면 책임감리용역”과 관련하여 아래와 같이 변경계약 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 방화대교 남단 접속도로 건설공사 전면 책임감리용역

나. 용역기간 : 총괄 2005.10.05. ~ 2015.11.30. / 12차 2015.01.01. ~ 2015.11.30.

다. 용 역 비 : 총괄 6,433,000,000원 / 12차 719,200,000원

라. 감 리 사 : ㈜삼보기술단 대표 이창윤

마. 설계변경 내역                                   (단위 : 천원)

구 분	용역비		용역기간		비 고
	당 초	변 경	당 초	변 경
총괄	6,433,000	6,667,800	2015.10.5. ~ 2015.11.30.	변경없음	증 234,800
12차	719,200	954,000	2015.1.1. ~ 2015.11.30.	변경없음	증 234,800

바. 예산과목

- 도시안전실 도로계획과, 도로건설, 간선도로망확충(일반회계), 의주로지하차도평면화사업, 감리비 : 234,800,000원

붙 임 : 보고서 및 내역서 각 1부.  끝.

	토목부장
주무관	홍상필		터널건설과장	권혁대		토목부장	09/10 노우성
협조자	경리과장	代정해민
시행	토목부-19028	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개