문서번호	급수운영과-23898
결재일자	2015.9.10.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
박종대		김광운	09/10 최명익
협조

기성검사(1차) 조서 제출에 따른 검토 보고서

(2015년 동부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 09.

동부수도사업소

(급수운영과)

기성검사(1차) 조서 제출에 따른 검토 보고서

(2015년 동부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사)

『 2015년 동부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)』시행 중 위탁공사 감독기관인 서울시시설관리공단과 ㈜이준엔지니어링에서 기성검사(감독) 조서(1차)가 제출되어 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

1				공사현황

○ 공 사 명 : 2015년 동부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)

○ 공사규모 : 아스팔트 140a, 콘크리트 6a, 보도블록 6a, 아스팔트 표층 175a

○ 공사기간 : 2015.06.15 ~ 2016.05.31

○ 계 약 자 : ㈜승건건설 김주택

○ 계약금액 : 1,858,728,018원

2				기성검사(1차) 개요

○ 기성기간 : 2015.06.15. ~ 2015.07.31

○ 기성금액 : 311,520,000원

○ 기성검사일 : 2015.09.08

○ 기성내역

계약금액	기성금액(1차)	집행잔액	비고
1,858,728,018원	311,520,000원 ( 공단 : 49,830,000원, 이준 : 261,690,000원 )	1,547,208,018원

3				검토사항

○ 검토사항 : 기성 세부내역 타당성 검토

○ 기성 세부내역(내역서 별첨)

연번	비목	계약금액(원)	기성금액(1차)		집행잔액		비고
			금액(원)	비율 (%)	금액(원)	비율 (%)
1	재료비	241,394,378	47,310,563	19.60%	194,083,815	80.40%	타당
2	노무비	700,145,710	109,077,157	15.58%	591,068,553	84.42%	타당
3	경비	470,240,574	81,933,308	17.42%	388,307,266	82.58%	타당
4	순공사원가	1,411,780,662	238,321,028	16.88%	1,173,459,634	83.12%	타당
5	일반관리비	84,706,839	14,299,261	16.88%	70,407,578	83.12%	타당
6	이윤	188,261,243	30,579,711	16.24%	157,681,532	83.76%	타당
7	부지임대료	5,004,000	-	0.00%	5,004,000	100.0%	타당
8	총공사원가	1,689,752,744	283,200,000	16.76%	1,406,552,744	83.24%	타당
9	부가가치세	168,975,274	28,320,000	16.76%	140,655,274	83.24%	타당
10	도급금액	1,858,728,018	311,520,000	16.76%	1,547,208,018	83.24%	타당

4				조치 의견

○ 위와 같이 검토한 바 기성내역이 타당하므로, 관련부서(행정지원과)와 협의하여 기성금 지급 등 후속 업무를 추진코자 합니다.

첨부 : 1) 관련 공문 사본 각 1부.

2) 기성검사조서(1차) 및 기성내역서 1부.

3) 기성(1차) 총괄내역서 1부. 끝.