문서번호	건축부-10369
결재일자	2015.9.10.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		문화시설과장	건축부장
김현지		안연수	09/10 안재혁
협 조
	경리과장			代정해민
	문화재보존팀장			이종혁

2015년 서울 운현궁 유물전시관 보수공사 발주계획

추진근거	대내(외) 협력 현황		사업비
	부서(단체)명	협의내용
문화본부 역사문화재과-9646호 (2015.5.1)	역사문화재과	2015년 운현궁 공사의뢰 및 사업분류 통지(2015.5.4)	***** ********* ********

2015. 9

도시기반시설본부

건  축  부

2015년 서울 운현궁 유물전시관 보수공사 발주계획

국가문화재인 서울 운현궁(사적 제257호) 내 유물전시관의 서측 일부분의 지붕처짐 및 흰개미 피해부분을 수리·보수하여 문화재를 보호하고 관람객의 안전 도모를 위한 보수공사 발주 계획임

1		공사개요

○ 공 사 명 : 2015년 서울 운현궁 유물전시관 보수공사

○ 위    치 : 종로구 운니동 114-10(사적 제257호)
○ 총사업비 : 50백만원(국비35백만원, 시비15백만원)

○ 사업기간 : 2015.5~2015.12

○ 보수범위

- 유물전시관 서측 지붕처짐 부분보수(도리 3개소, 서까래 6개소 등)
- 유물전시관 서측 내부 흰개미피해 부분보수(하인방 3개소, 기둥 4개소 등)
- 유물전시관 서측 쪽마루 청판 노후부분(교체율 30%, 동자주 6개소 등)
- 기타공사 : 창호부분, 인방재 떼내기 후 재조립 사용

2		추진경위

○ ‘15. 5.  1 : 2015 운현궁 문화재 시설보수 공사계획(역사문화재과)
○ ‘15. 5.  4 : 운현궁 보수공사 의뢰(역사문화재과→건축부)
○ ‘15. 5. 22 : 기술용역타당성 심사 완료(적정)
○ ‘15. 6. 18 : 설계용역 착수
○ ‘15. 7. 20 : 설계용역 기술지도 자문회의 실시 (자문위원: 권기혁, 조재량)
○ ‘15. 8. 14 : 설계용역 완료
○ ‘15. 9.  8 : 서울시 문화재위원회 설계승인 통보(역사문화재과→건축부)

3		공 사 비

********************

- 예산과목 : 문화관광디자인본부 역사문화재과, 문화유산의 계승발전,
전통문화시설 운영, 운현궁위탁운영, 시설비(401-01)

4		공사기간

○ 공사기간 : 착공일로부터 60일

5		공사발주 계획

○ 입찰방법 : 제한경쟁입찰(지역제한:서울시)

○ 현장설명 미실시

○ 입찰참가자격

- 문화재수리 등에 관한 법률 제14조에 의한 종합문화재수리업(문화재보수단청업)을 등록한 업체로서 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 당해자격을 유지하고 주된영업소가 서울특별시에 소재한 업체

○ 낙찰자 결정방법

- 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(안전행정부 예규 제19호,`15.4.10) 제2장 시설공사 적격심사 세부기준 <별지7> (문화재공사 1억원 미만)

○ 관련규정

- 제한경쟁 : 지방계약법 제9조 및 같은법 시행령제20조
- 현장설명 : 지방계약법 시행령제15조제3항 단서규정에 의거 생략

○ 하자보증기간

- 문화재수리등에 관한 법률 시행령 제19조 관련 <별표9>(문화재수리의 종류별 하자담보책임기간)에 따름

5		향후 추진계획

○ `15.  9. : 공사 착공

○ `15. 11. : 공사 완료

붙 임  1. 계약요청서 1부.
2. 공사집행계획서 1부.
3. 사업계획 방침서 1부
4. 설계도서(시방서,내역서,설계도면,예정공정표) 1부.  끝.