문서번호	서울숲공원관리사무소-5253
결재일자	2015.9.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설팀장	서울숲공원관리사무소장
김윤수	현호재	09/11 배정복

서울숲공원 노후목재시설 정비공사 감독보고

2015. 9

동부공원녹지사업소

(서울숲공원관리사무소)

서울숲공원 노후목재시설 정비공사 감독보고

서울숲공원 보행가교 데크상판 교체공사와 관련하여 공사기간 연장이 필요한 사항이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

1. 공사개요

○ 기    간 : 2015.08.17 ~ 09.14

○ 도 급 액 : 구천이백팔십사만오천육백이십원(92,845,620원)

○ 시 공 자 : (주)만송조경 대표 이상미

○ 공사내용

- 보행가교 상판교체 : 225m

- 바람의언덕 전망데크설치 : 112.5경간

- 물놀이터 퍼걸러 지붕보수 : 1개소

- 공중걷기 : 1개소

○ 공 정 율 : 87% (2015.09.10 현재)

2. 실정보고사항

○ 공사구간 보행가교를 완전통제하지 않고 부분통제하며 보행객 통행을 허용하였으나, 주말에는 이용객이 많아 안전사고 우려로 작업이 어려워,

○ 공사에 필요한 절대공기가 부족한 실정으로 공사기간 연장이 불가피함.

3. 검토의견

○ 공원이용객 안전사고 우려를 위해 주말공사를 중단한 사항으로 원활한 시공을 위해서는 공사중단기간을 감안한 공사기간 연장이 필요하다 사료됨.

○ (당초) 2015.08.17. ~ 09.14  ⇒ (변경) 2015.08.17.~ 09.21

4. 향후계획

○ 공기내 공사가 마무리 될 수 있도록 현장감독에 만전을 기하겠음.

붙 임 : 시공업체 공사기간 연장요청서 1부.(별첨)  끝.