시 행	설비부-11221
시행일자
수 신 자	내부결재

결재	주무관	건축설비과장	설비부장
	김경남	김영수	09/11 代이달영

설계변경 자문회의(소위원회) 자문결과(제16차) 보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			설비부-11015호				요청부서		건축설비과		자문일자		2015.09.10
공 사 명			서남권 돔야구장 주변 보행자 전용도로(보행광장) 설치공사(전기)
공 사 개 요			공사규모				지하차도조명 392등, 배전반 1면, 보행광장 조명 (보행등 129등), 분전반 2면, 기타 1식
			공사기간				2013.05.31 ∼ 2015.09.20
			감 리 사				(주)무림설계기술단
			설 계 사				상진기술엔지니어링(주)
			시 공 사				유신전기건설(주), 대일전기통신(주)
자문요청사유							5,000만원 이상 변경사항
□ 설계변경 사유 (요약) ◯ 발주처 및 유지관리부서 요구에 따른 물량 변경 등 - 재방송설비, 동선 유도등 등 삭제 - 야간작업에 따른 노무비 증가
원설계자 의견
자문결과		조건부			붙임 자문위원 지적사항 보완 조건
자문결과 조치					· 자문위원 지적사항을 보완하여 설계에 반영조치
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위원장			김창균				간 사		김경남
	위 원			김원태				위 원		성호준
	위 원			곽용길				위 원		박시현