투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	설계변경(제1회) 시행 (2015년 노후포장도로 정비공사(2구역)-강서

우리사업소에서 시행하고 있는“2015년 노후포장도로 정비공사”에 대한 설계변경(제1회) 아래와 같이 시행코자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 :  2015년 노후포장도로 정비공사(2구역)-강서

나. 공사기간 : ‘15. 05. 18 ~ ’15. 11. 30

다. 공사개요 : 절삭후 덧씌우기 842a

라. 도 급 자 : 건웅토건(주) 대표자 이 상 춘

마. 변경사유 : 물량 증·감

바. 변경내역                                        (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증·감	비고
도급비	공급가액	372,105,255	372,105,255	-
	부 가 세	37,210,525	37,210,525	-
	계	409,315,780	409,315,780	-

사. 예산과목  :  도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로정비, 시설비 및 부대비, 시설비

따로붙임 1) 설계변경 검토보고서 1부.

2) 설계변경 내역서 1부.

3) 합의각서 1부.   끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	구희옥		도로보수과장	김권일		강서도로사업소장	09/11 조병준
협조자	관리단속과장	이은엽		계약1팀장	김점선
시행	도로보수과-8740	(		)	접수		(		)
우			/
전화	2657-7951	/전송	2657-7960	/	kooheeok@seoul.go.kr	/	대시민공개