서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	동작구청장(복지정책과장)
(경유)
제목	2015년 종합사회복지관 기능보강사업 계획 변경(낙찰차액 사용) 검토결과 통보

1. 동작구 복지정책과-106856호(2015.8.24.), 시 복지정책과-6429호(2015.9.10.)와 관련입니다.

2. 2015년도 기능보강사업 추진과 관련하여 사업계획 변경 요청에 대한 검토 결과를 다음과 같이 통보합니다.

가. 대상시설 : 동작구 사당종합사회복지관

나. 사 업 명 : 강당방음공사(기존) / 방음문교체공사(추가)

다. 세부내역(붙임 참조)

(단위:천원)

사업명	내 용	기 존				변경요청
		계	시비	구비	자부담	계	시비	구비	자부담
강당방음공사	사업비	33,000,000	19,800,000	13,200,000	-	29,104,950	17,462,970	11,641,980	-
	내용	- 강당 창문 이중창 교체 및 벽면 흡음재 공사 완료 (낙찰차액 3,895,050원 발생)
방음문교체공사 (추가)	사업비	-	-	-	-	2,750,000	1,650,000	1,100,000	-
	내용	- 낙찰차액 사용하여 강당 발코니 출입문 이중문 교체 추가

라. 검토결과 : “승인”

- 기존 사업과 연계된 사업으로서 동시에 사업 진행하는 것이 타당함

※ 최초 사업신청 시 사업계획 철저히 검토하여 변경 없도록 주의 촉구

붙  임 : 검토결과(동작구-사당).  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이광훈		시설지원팀장	오은미		복지정책과장	09/11 엄의식
협조자
시행	복지정책과-6534	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가)	/
전화	02-2133-7355	/전송		/	kwang92@seoul.go.kr	/	대시민공개