투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	준공기한 연기요청(낙산배드민턴장 이전공사)

1. 시설과–5865(2015.8.18.)호와 관련입니다.

2. “낙산배드민턴장 이전공사”에 대하여 아래와 같이 준공기한을 연기하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 낙산배드민턴장 이전공사

나. 도 급 액 : 12,000,000원

다. 공사기간 : 2015.8.24. ~ 9.12.

라. 도 급 자 : 형진랜드㈜ 대표 유진숙

마. 금액변경 : 없음

바. 준공기한 연기

- 당초 : 2015.8.24. ~ 9.12.

- 변경 : 2015.8.24. ~ 12.30.(109일 연장)

붙임  1. 검토 보고서 1부.

2. 준공기한연기의뢰서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	황윤채		시설과장	09/11 代김윤철
협조자
시행	시설과-6579	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231, 중부공원녹지사업소 시설과	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5968	/전송	02-3783-5969	/		/	대시민공개