	강서도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	관급자재 수량 및 납품기한 변경 요청(철제도로중앙분리대 외1종)

1. 시설보수과-5909호(2014.7.31.)와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행중인 “외발산지하차도보수공사”에 사용되는  관급자재를 아래와 같이 수량 및 납품기한 변경하고자 합니다.

가. 공사명 : 2015년 도로시설물일상유지보수공사(강서)

나. 변경사유 : 당초 구매물량 오기 및 납품기한 연기

다. 관급자재 변경 구매 요청내역

품 명	나라장터 물품식별번호	규 격	단위	수량		금액(원)		비고
				당초	변경	당초	변경
철제도로 중앙분리대	22329616	도로중앙분리대, 쓰리에스, W2000*H870mm	경간	95	115	50,160,000	60,720,000
철제가드레일	22335280	도로중앙분리대, 쓰리에스, 350*380*3.2mm	개소	4	4	1,492,000	1,492,000
소계							62,212,000
조달수수료	1.07%						665,670
합계							62,877,670

라. 납품기한 변경

품 명	나라장터 물품식별번호	규 격	단위	수량		납품기한		비고
				당초	변경	당초	변경
철제도로 중앙분리대	22329616	도로중앙분리대, 쓰리에스, W2000*H870mm	경간	95	115	2015.9.10	2015.9.25
철제가드레일	22335280	도로중앙분리대, 쓰리에스, 350*380*3.2mm	개소	4	4	2015.9.10	2015.9.25

마. 예산과목 : 도시안전본부, 도로시설과, 도로시설관리, 지하차도안전                             관리, 도로시설물운영, 터널시설관리, 도로시설물(터널,                             복개,지하차도)일상유지보수, 시설비

따로붙임 : 관급자재 구매 공문 1부. 끝.

	시설보수과장
주무관	김승진		시설보수과장	09/11 박병연
협조자
시행	시설보수과-7189	(		)	접수		(		)
우	07520		/	www.seoul.go.kr
전 화	02-2657-7975	/전송	02-2657-7970	/	ktmksj@seoul.go.kr	/	대시민공개