문서번호	급수운영과-15618
결재일자	2015.9.11.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
이덕규	김용현	09/11 전명수
협 조

준공기한 연기 보고(신설-80)

명에 의거 마천동외 13개동 상수도공사 담당업무 수행중 아래와 같은 사유가 발생하여 급수공사 준공기한을 연기하고자 보고합니다.

▢ 보고 요지 : 준공기한 연기

▢ 공사 현황

지시번호	공사위치	당초공사기간	변경공사기간
신설-80	송파구 문정동 82-1	2015.9.1.~9.11	2015.10.5까지

▢ 연기사유

- 신축공사 지연으로 인한 수요가 요청

▢ 지체상금 부과여부 : 미부과

▢ 조치내용

- 위와 같이 이유로 공사기간을 연기하고 변경된 공사 기간을 『2015년 마천동외13개동 상수도공사』 계약 상대자인 신왕건설(주)에 통보하고자 합니다.

따로붙임  공사연기요청서 1부.  끝.