서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(국회대로 지하차도 및 상부 공원화 사업(1단계) 입찰안내서 작성 용역)

우리과에서 시행중인 ‘국회대로 지하차도 및 상부 공원화 사업(1단계) 입찰안내서 작성 용역’에 대하여 다음과 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역명 : 국회대로 지하차도 및 상부 공원화 사업(1단계) 입찰안내서 작성 용역

나. 계약자 : ㈜수성엔지니어링

다. 준공기한 연기내역

- 당 초 : 2015. 9. 3

- 변 경 : 2015. 9. 30

라. 귀책소재 : 서울특별시

마. 연기사유 : 입찰안내서 심의(‘15.8.26) 의결사항에 대한 용역 검토기간 소요로 절대공기 부족

붙임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 연기방침서 1부.

3. 합의각서 1부. 끝.

	도로계획과장
주무관	윤갑진		광역도로계획팀장	최연호		도로계획과장	09/12 최동필
협조자
시행	도로계획과-696	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청 10층 도로계획과	/
전화		/전송		/		/	대시민공개