함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	공사 변경계약 체결 알림

1. 시설관리과-17261(2015.09.10)호와 관련입니다.

2. 『명일동 46-4~48-7간 외 1개소 송배수관 정비공사』건에 대하여 아래와 같이 변경계약을 체결하였기에 알려 드립니다

가. 건    명 : 명일동 46-4~48-7간 외 1개소 송배수관 정비공사

나. 계약업체 :  태성건설(주)  대표 : 홍영인

다. 공사기간 : 2015.5.20.~9.10

라. 변경내역 : 신규공종 및 계약물량 감

1) 당초 계약금액 : 175,904,300원

2) 변경 계약금액 : 170,830,000원

3) 증감 내역 : 감5,074,300원

마. 변경계약 체결일 : 2015.9.10

바. 변경사유 : 당초 D=150~400mm, L=672m

변경 D=150~400mm, L=502m(감 70m)

붙임 : 공사변경계약통보서,설계변경내역서,합의서 각 1부.  끝.

	행정지원과장
주무관	박성희		행정관리팀장	권혁명		행정지원과장	09/14 장성만
협조자
시행	행정지원과-15068	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51	/
전화	02-3146-5013	/전송	02-3146-5078	/		/	부분공개(7)