문서번호	교육정책담당관-12512
결재일자	2015.9.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교육사업지원팀장	교육정책담당관
이철균		최형대	09/14 배형우
협조

지방 폐교 활용 가족자연체험시설(철원 유곡분교)

지하수 개발 공사 기간연장 계획

2015. 9.

평생교육정책관

(교육정책담당관)

지방 폐교 활용 가족자연체험시설(철원 유곡분교)

지하수 개발 공사 기간연장 계획

철원 가족자연체험시설 생활용수(식수 등) 제공을 위해 추진중인

지하수 개발 공사가 ‘북한의 지뢰 포격 도발’에 따른 공사 일시중단(출입통제) 등으로 지연됨에 따라 공사 기간을 연장하고자 함.

□ 추진근거

❍ 서울특별시 가족자연체험시설 설치 및 운영 조례(2013. 5. 16.)

❍ 지방 폐교 활용 가족자연체험시설 조성 계획(부시장 방침, 2015. 3. 5.)

❍ 지방 폐교 활용 가족자연체험시설 조성 계획(대상지 확정, 2015.5.19.)

□ 추진경과

❍ 지하수 개발공사 계약체결 : 2015.8.24

❍ 지하수 개발공사 추진     : 2015.8.24.~9.17(준공예정)

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 지방 폐교 활용 가족자연체험시설 조성(철원) 지하수 개발 공사

❍ 공사위치 : 유곡분교(강원 철원군 근북면 유곡리 512 소재)

❍ 공사기간 : 계약일로부터 25일

❍ 공 사 비 : 14,250천원  * 공사비 변동없음

※ 예산과목 : 학교지원 및 우수인재양성, 학교교육지원, 폐교를 활용한

가족자연체험시설 조성 운영, 사무관리비.

❍ 공사내용

- 착정개발(굴착), 시추조사, 확공개발(우물설치), 양수시험

- 모터펌프설치, 컨트롤박스 설치, 수질검사, 기타 제반사항 등

❍ 계약방법 : 수의계약(최초 계약일 : 2015.8.24.)

□ 기간연장 및 귀책사유

❍ 기간연장 사유

- 북학의 지뢰 포격 도발에 따른 공사일시 중단(민통선내 출입통제)에

따른 공사 기간 연장

※ 민통선내 출입통제, 지하수 굴착기계 사용관련 군부협의 심의 등 기간소요

❍ 귀책사유 : 서울특별시

※ 공사현장(철원군 근북면 송한리 민통선내)이 접경지역에 위치한 지리적 영향

□ 추진일정

❍ 기간연장에 따른 지하수 개발 공사 변경계약 의뢰(재무과) : ’15.9.14일한

❍ 지하수 개발 공사 준공 : ’15.10월중

붙임 : 유곡분교내 지하수 개발 및 관정 설치 위치 1부.

붙임 1

유곡분교 내 지하수 개발 및 관정 설치 위치

□ 관  정 설치 위치 : 학교건물 우측 뒤편(남녀 화장실 뒷편)

□ 물탱크 설치 위치 : 교실 우측에서 2번째 교실

※ 관정 위치는 수맥 탐지 및 굴착 등 매장 용수량에 따라 변동될 수 있음