문서번호	설비부-11307
결재일자	2015.9.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
배수웅		김영수	09/14 박기형
협조

『서남권야구장 건립공사(전기,통신분야)』

운영자 요청 추가 시설개선에 따른 설계변경 검토 보고

2015. 9.

설  비  부

운영자 요청 추가 시설개선에 따른

설계변경 검토 보고

『서남권야구장 건립공사(전기,통신분야)』관련, 운영자(시설관리공단) 요청에 따른 시설물 추가 등 시설개선 설계변경 검토 보고임.

공사개요

□ 공 사 명 : 서남권야구장 건립공사

□ 공사규모 : 지하2층, 지상4, 연면적 83,476㎡, 야구장(18,076석)

□ 공사기간 : 2009. 02. 05. ～ 2015. 09. 15.

□ 공사금액 : 197,416백만원

□ 도 급 자 : 현대산업개발 컨소시엄(한진중공업, 성지건설)

□ 감 리 사 : 선엔지니어링(소방), 혜원까치(기계,통신), 엠에스제이텍(전기)

추진경위

□ ‘15. 08. 28 시설개선 진행 요청(건축부-9824호)

□ ‘15. 08. 31 실정보고 및 설계변경소위원회 자문요청(서야감 제2015-228호)

□ ‘15. 09. 08 설계변경 자문 및 자문결과 통보(설비부-11075)

□ ‘15. 09. 11 자문 지적사항 조치결과 보고 및 설계변경 요청(서야감 제2015-236)

설계변경 사유 및 주요내용

□ 설계변경 사유

- 운영자(시설관리공단) 요청에 따른 공산 사무실 등 구획 변경

- 응원단석 추가, 스피드업, 스피드건 등 기능 추가

□ 설계변경 주요내용

- 공단사무실 변경에 따른 전기, 통신 배관, 배선  물량 추가

- 응원단석 전원반 추가 및 스피드업, 스피드건 추가

- 주차 사전예약제 시스템 추가 및 방재센터 통합모니터링시스템 추가

□ 공사비 증감 현황

(단위 : 천원)

공 종	변경전	변경후	증·감
전기(소방포함)	18,441,097	18,631,563	증 190,466
정보통신	5,662,796	5,692,659	증 29,863
계	24,103,893	24,324,222	증 220,329

분야별 주요 변경내용

【 전기 및 전기소방분야 】

□ 방재센터 인테리어 공사(건축분) 관련 통합 모니터링 설비 추가

□ 스피드업 시계 3개소, 스피드건 2개소 추가(전광판 연계 포함)

□ 공단사무실 변경에 따른 시스템박스, 조명설비, 배관, 배선 추가

□ 응원단상 분전반 2면 및 배관, 배선 추가 등

【 통신분야 】

□ 주차 사전예약시스템 추가에 따른 소프트웨어 제작 및 PDA 추가

□ 공단사무실 변경에 따른 배관, 배선 및 시스템 박스 추가

□ 대회의실 위치 변경으로 배관, 배선 및 A/V설비 이동 설치 등

처리의견

□ 책임감리원으로부터 제출된 설계변경 요청사항을 사업 총괄부서인

건축부에 계약변경 요청

향후계획 : 2015. 9.  총차 계약변경 및 공사준공. 끝.