소방정보ㆍ통신장비 구입설치(공사) 감독일지
전산통신과-4993				담당자	전산운영팀장	전산통신과장	결재
				정석희	서용석	09/14 강경철
공정 내용	진척공정	35.12 %	진척주요추진사항
	금주공정	9.3 %	금주주요추진사항
금주 설치 작업 내용 o HP server 입고 및 시스템 POST 진행(GIS, 연계, 통계DB등 총 7대) o EMC storage LUN 할당 → 지령DB : 100GB * 5ea, 5GB * 1ea → 지령AP#1 : 100GB * 5ea → 지령AP#2 : 100GB * 5ea → 지령개발 : 100GB * 10ea, 5GB * 1ea o 지령DB 서버 쿼럼 디바이스 변경(로컬에서 스토리지로) o 지령AP 서버 IP 할당 o 지령AP서버 이관을 위한 사전 미팅(운영팀, 유지보수팀, 디엠아이시스템즈, 골든디지털) o ASIS 지령 DB 서버에서 Data Pump를 이용하여 데이터 추출 작업 진행 → ASIS 지령 DB 서버에 Data Pump공간이 부족하여 신규 장비에서 NFS 설정 후 테스트 진행 o 지령AP 서버#1, #2, 개발 서버에 TMAX 엔진 설치 및 기동 테스트, 엔진 설치 후 컴파일 작업 수행 o 컴파일 작업 수행중 TOBE 시스템에 실 데이터가 없어 중단 o ASIS 지령DB서버에서 풀 Pump 실행하여 소요시간 확인 o TOBE 지령 DB 서버에서 Pump data import 소요시간 확인 o 테스트용 DB 데이터 이관 완료 o 시스템 이관 방안에 대한 회의 개최(with 전산운영팀) o TO 지령 서비스 구동 및 문제점 파악(with 골든 디지털) o 시스템 환경 파악 및 시스템 데이터 마이그레이션 방법및 구축 방안 토의
금주 투입 인원 o 전산운영팀 : 소방교 정석희 o (주)디엠아이시스템즈 : 이광용 차장, 정연권 차장, 최홍석 차장, 송현수 대리, o (주)베이넥스 : 이재영 부장, 신진식 과장, 김영민 과장양재일 사원 o (주)인성정보 : 황선택 차장, 김동길 대리
현장대리인에게 지시사항
특기사항