포장복구공사 준공연기 보고서

주무관	급수운영과장			결재
김광운	01/03 안재엽
협 조

문서번호 :	급수운영과-190

2013년 동부수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사(장기계속) 감독업무 수행중 준공기간 연기 사유가 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

2014. 1. 3.

보고자 : 직  지방시설주사   성명 : 김광운

공사현황

공사명 : 2013년 동부수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사

도급자 : 고천건설(주)  대표 윤영선

작업지시 현황

연번	작업지시번호	위 치	공사종별	공사기간	비고
1	성동-234	성수2가1동 321-85	누수복구	2013.12.24.~2014.01.03

보고내용

준공기한 연기사유 : 굴착복구공사 시행하고자 주변에 공사로 인하여 부득이 포장복구작업(표층) 시행이 불가한 실정임.

보고자 의견

위와같이 실정으로 표층할수 있는 여건이 형성된 후 포장하여야 함으로 아래와 같이 준공기한을 연기하고자 합니다.

-  당초 공사기간 : ‘13. 12.24. ~ ’14. 1. 3.

-  변경 공사기간 : ‘13. 12.24. ~ ’14. 1.10.    끝.