문서번호	세무과-21071
결재일자	2015.9.14.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		세무정보화팀장	세무과장
박수임		안효무	09/14 김윤규
협조

2015년 세무종합시스템 운영 및 유지관리 부분준공(2차) 검사 결과 보고

2015. 9.

2015년 세무종합시스템 운영 및 유지관리

부분준공(2차) 검사 결과 보고

2015년 세무종합시스템 운영 및 유지관리 사업과 관련하여  부분 준공(2차) 검사를 실시하고 결과를 보고 드림

유지보수 계약 개요

○ 계약건명 : 2015년도 세무종합시스템 운영 및 유지관리

○ 사 업 자 : ㈜씨와이디 정보기술 컨소시엄

○ 계약방법 : 공개경쟁입찰/협상에 의한 계약

○ 기    간 : 2015.3.1.~2015.12.31

○ 금    액 : 1,423,000천원

○ 사업범위

- 응용프로그램 추가개발 및 기능개선

- 세무종합시스템 개인정보 암호화

- 세무종합시스템 응용 및 시스템 소프트웨어 유지보수

- 지방세 부과·징수 처리 및 운영 지원

유지보수 진척률

구 분	계 획	누적실적(금회)	진척률
보완 개발	30건	16건(11건)	53.3%
추가 개발	36건	23건(7건)	63.9%
응용 프로그램	-	914건(396건)	-

유지보수비 지급 내역

❍ 부분 준공(2차) 내역

구 분	세 부 내 용
기 간	2015. 6. 1. ~ 8. 31.
금 액 271,187천원	① 추가 개발비(총 18본) : 40,242,914원 ․ 유형별 기능수 : 30, 총 기능점수 : 104.5 ․ 총 변경율 : 45.4%적용(88,640,780원*45.4%) ② 응용프로그램 유지보수비(총 518본) : 180,809,190원 ․ 1개월당 단가 60,269,730원 * 3개월 ③ 시스템SW 유지보수비 : 25,481,700원 ․ 1개월당 단가 8,493,900원 * 3개월 ④ 부가가치세(10%) : 24,653,380원

※지급내역

구 분	계약금액	부분준공(1차)	부분준공(2차)	잔 액
합 계	1,423,000천원	288,669천원	271,187천원	863,144천원
공공운영비	756,400천원	226,920천원	226,920천원	302,560천원
전산개발비	666,600천원	61,749천원	44,267천원	560,584천원

검사(수) 내역

❍ 검사 대상 : 추가개발 프로그램, 응용 및 시스템SW 유지보수

❍ 검사방법

구 분	검사 방법	비 고
추가 및 보완개발	개발 완료된 프로그램에 대해 유지보수업체에서 1차 검증 후 세목별 담당자 2차 검증 실시 사용자 추가 요구사항 반영 후 세목별 담당자의 승인으로 검사	기능점수 적용
응용프로그램 운영 및 유지보수		월별 단가 적용
시스템SW 유지보수	- SW 제조사별 정기점검 이행여부 검사	월별 단가 적용

유지보수 추진 내역

❍ 추가 및 보완개발 내역(총18건)

연번	관리번호	내 역
1	FNC-01	(압류)추심내역관리
2	FNC-06	(주민세)일괄감액처리기능
3	FNC-11	(환급)환급금 지급보류 설정 개선
4	FNC-13	(현계)통합자금관리시스템 자료 조회
5	FNC-18	(주민세)재산분 건물사용명세 신고서 출력
6	FNC-22	(통합취득세(부동산))회원권 일괄등록등 기타사항
7	FNC-28	(재산세)재산세 부과누락 방지를 위한 정기분관리 기능 추가
8	MAR-01	(환급)환급통지서 출력 이력관리
9	MAR-02	(환급)환급 등록시 거소지 반영
10	MAR-04	(주민세)과세기초자료(주민망 세대주자료) 정보 연계 기능
11	MAR-06	(부과및제증명)법인사업장 부과 및 증명서 출력시 국세청 사업장정보(Wetax연계) 참조 기능 등
12	MAR-14	(세정연감)세목별 통계 서식변경 사항 반영
13	MAR-15	(세정연감)징수편 통계 추가 관련 프로그램 보완
14	MAR-16	(세정연감)세정연감 부과실적관리 징수편 추가에 따른 기능보완
15	MAR-19	(공통)우편번호 체계 변경
16	MAR-24	(재산세)가상계좌 수협은행 추가에 따른 반영
17	MAR-25	(재산세)지방세특례제한법 감면 상한제 도입에 따른 재산세 세액계산
18	MAR-36	(등록면허세(면허))공동납세자 조회기능 추가

❍ 시스템 SW 정기(수시) 점검

- 연계 솔루션, WAS, 웹서버, SSO

- 문서보안, 형상관리, 시스템모니터링, 원격지원 등

첨부 : 1. 추가및보완개발 검증내역서 1부.

2. 응용프로그램 및 시스템SW 유지보수처리내역 1부.

3. 추가개발산출물 1부.  끝.