문서번호	시설관리과-15298
결재일자	2015.9.14.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
정성식		김만재	09/14 代이문성
협조

설계변경 심의위원회 개최 결과보고

(2015년 수유1동외8개동 상수도공사 - 1차변경)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 09

시설관리과

설계변경 심의위원회 개최 결과보고

우리사업소에서 시행중에 있는『2015년 수유1동외8개동 상수도공사(장기계속

단가계약)』시행중 시공 물량 증·감이 발생됨에 따라 설계변경 심의 위원회를

개최하여 심의 완료하고 결과를 보고드림.

1. 일 반 현 황

가. 공 사 명 : 2015년 수유1동외8개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 공사개요

당  초 :  D=13∼300㎜,   L=1,441m

변  경 :  D=13∼300㎜,   L=1,440m

다. 공사기간 : 2015.05.15. ~ 2016.06.30

라. 도 급 비

당  초 : 금513,413,790원(금오억천삼백사십일만삼천칠백구십원)

변  경 : 금513,413,790원(금오억천삼백사십일만삼천칠백구십원)

바. 도 급 자 : 주건엔지니어링(주)  대표 홍성연

2. 심의위원회 개최

가. 심의일정 : 2015년 09월 14일(월)  11:00

나. 심의장소 : 북부수도사업소 시설관리과

다. 심의위원 : 위원장(시설6급 김만재)

위  원(시설6급 이문성, 시설7급 유광창, 시설7급 박상권)

3. 심 의 내 용

○ 2015수유1동외8개동 상수도공사(단가계약) 설계변경 심의

- 수량변동 및 단가적용의 적정성 여부

- 계약변동 (증·감)수량 단가 낙찰률 적용범위내 적용 적정여부 등

- 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 여부 등

4. 설계변경 금액 내역

구 분	당초(원)	변경(원)	증·감(원)	비 고
총공사비	618,413,790	618,413,790	없음
도급비	513,413,790	513,413,790	없음
관급비	105,000,000	105,000,000	없음

5. 설계변경 사유

○ 신규공종 발생 및 시공물량 증,감에 따른 변경

- 신규공종 : 아스팔트 포장절단외 62개공종

○ 주요공종 세부 변경내역 : 따로붙임(설계변경 내역서)

6. 심의결과

○ 설계변경 타당성 : 타당함

○ 신규공종 발생유무 및 단가적용 타당성 : 타당함

○ 제잡비 적정 산정 및 적용 적정성 : 적정

○ 계약변동(증,감) 물량 계약단가 낙착률 적정 적용여부 : 적정

○ 각종 제반규정 준수여부 : 준수

○ 관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토 : 적합

첨 부 : 1. 설계변경 사유서 1부

2. 설계변경 심의 결과 1부.

3. 설계변경 내역서 1부. 끝.