문서번호	방재시설부-12322
결재일자	2015.9.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
노태학		이도헌	09/14 代이도헌
협 조
	주무관			장수철

『신이문 빗물펌프장 증설공사』

토목 휀스설치 등 부대공 실정보고 검토

2015. 9

『신이문 빗물펌프장 증설공사』

토목 휀스설치등 부대공 실정보고 검토

「신이문 빗물펌프장 증설공사」토목공사 중 가시설변경 및 동대문구청 유지관리부서의 요청을 수렴하여 이를 검토하여 보고드림

▶ 관련근거 : 서울시설관리공단 공사감독2처–13966(2015.09.07)호

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 신이문 빗물펌프장 증설공사

○ 위    치 : 동대문구 이문동 58-3

○ 규    모 : 펌프장 토출용량 Q=875㎥/분

○ 사업기간 : 2013.01.03. ~ 2015.12.31

○ 사 업 비 : 5,004백만원

Ⅱ		검토 내용

○ 실정보고 사유

▶ 토목공사중 가시설변경 및 유지관리부서요청에 따라 부대공사 접이문, 휀스등 실물량 변경

- 가시설 위치이동에 따른 기존 휀스철거 반영

- 유지관리부서(동대문구청) 요청에 따른 메쉬휀스, 자바라대문 반영

- 주요공종 증·감현황

공 종	규격	단위	수 량		증·감	비 고
			당 초	변 경
휀스철거	type-b	경간	8	26	증) 18
메쉬휀스	h=1800,L=2000	경간	-	27	증) 27
메쉬출입문	h=1800,L=1000	개소	-	2.5	증) 2.5
대문자바라	500*1500	m	-	7.5	증) 7.5

- 공사비 : 증) 12,100천원

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
직접공사비	20,602	28,396	증) 7,794
제경비	7,798	11,004	증) 3,206
공급가액	28,400	39,400	증) 11,000
부가가치세	2,840	3,940	증) 1,100
도 급 비	31,240	43,340	증) 12,100

Ⅲ		감리 검토의견

○ 동대문구청 유지관리부서의 요청에 따라 실물량 반영조치

Ⅳ		조치계획

○ 감리의 의견이 타당하다고 판단됨에 따라 부대공 설계변경에 반영토록 조치코자 함

붙  임  1. 감리단 실정보고서 1부.

2. 관련공문 각 1부.  끝.