보고서(급수공사 작업기한 연기)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
박상열	김태형	09/14 최명익
협 조

문서번호 :	급수운영과-24177

광진구 상수도공사 감독업무 수행(************ 1개소 급수공사) 중 아래와 같은 사항이 발생하여 보고합니다.

2015. 09. 14.

보고자 : 직  지방시설주사보   성명 : 박 상 열

제목 : 급수공사 연기 보고

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2015년 광진구 상수도공사(장기계속공사)

연번	주 소	수요가명	공사기간	지시번호	비 고
1	***********	***	`15.08.29. ~ 09.14.	신설-175	신축
2	***********	****	`15.08.29. ~ 09.14.	신설-176	신축
			이하여백

□ 연기요청사항

연번	주 소	수요가명	연기요청 사유	공사연기 기간	요청인
1	***********	***	신축현장 타공정 지연에 따른 공사연기	`15.09.24	***
2	***********	****	신축현장 타공정 지연에 따른 공사연기	`15.09.24	****
			이하여백

□ 검토결과

○ 신축현장 타공정 지연에 따 수용가측 공사연기 요청 등으로 공사기간내 공사가 어려워 아래와 같이 연기하고자 합니다.

연번	주 소	수요가명	당초 공사기간	변경 공사기간	비고
1	***********	***	`15.08.29. ~ 09.14.	`15.08.29~ 09.24
2	***********	****	`15.08.29. ~ 09.14.	`15.08.29~ 09.24
			이하여백

□ 귀책사유 : 동부수도사업소

□ 지체상금 부과여부 : 미부과.  끝.