문서번호	토목부-19260
결재일자	2015.9.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
한병찬		진재섭	09/14 노우성
협조

교량 유지관리용 계측시설(케이블가속도계)설치 변경 검토 보고

- 구리암사대교 건설공사 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 9.

도시기반시설본부

(토 목 부)

교량 유지관리용 계측시설(케이블가속도계)설치 변경 검토 보고

시설물 운영부서(구, 도로시설과)현장점검 결과에 의해 본선 교량 아치교구간 유지관리용 계측시설(케이블가속도계)변경에 따른 검토 보고임.

※ 암사(감리)2015 - 495호(’15.9.8.) : 교량계측시설(가속도계) 정산 실정보고

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 구리암사대교 건설공사

○ 규    모 : 교량건설 폭 4∼6차로, 연장 1.13㎞

○ 계 약 액 : 192,599백만원(15차 18,517백만원)

○ 공사기간 : ’06.4.5. ∼’15.10.30.(15차 ’14.12.11.∼’15.10.30.)

○ 시공사 및 감리단 : 현대건설㈜, ㈜도화엔지니어링외 1개사

□ 감리단 보고내용

○ 추진경위

- 2014. 8.17. : 구리암사대교 계측시스템 현장검점(구 도로시설과)

- 2014. 9. 5. : 운영부서 합동점검 요청(도기본 → 구 도로시설과)

- 2014.10. 7. : 계측시스템 점검결과 통보(구 도로시설과 → 도기본)

※ 구리암사대교 계측시스템 검토보고(구 도로시설과 - 17455호, ’14.10.6.)

○ 변경내용

- 당 초 :	아치교구간 케이블 장력측정용 가속도계 설치 : 3개소 ※ 보호관 외부 부착	〈케이블가속도계 설치 “예시”그림〉
- 변 경 :	케이블 장력측정용 가속도계 제외

○ 시설물 운영부서(구 도로시설과 → 교량안전과) 검토내용

- 주교량 계측기 설치 현황

S : 응력계, ↓: 처짐계, V : 가속도계 (케이블가속도계 제외   )

W : 풍향풍속계, T : 온도계, D : 슈 변위계

‣ 설치 개요도

- 시설물 운영부서 검토의견

‣ 장력판단이 어려운 케이블가속도계(3개소)는 교량구조상 케이블이 붕괴 유발부재가 아닌점을 감안하여 유지관리계측에서 제외

※ 암사대교와 동일한 미충진 케이블로 설치된 ‘양화대교’에서도 케이블 계측을 실시하고 있지 않음.

- 전문가 자문결과(구 도로시설과, 2014. 9.26.)

‣ (김규선 : 한국시설안전공단) 케이블의 길이가 짧고, 케이블 강선과 보호튜브(HDPE)의 진동시 일체성이 부족한 경우, 현장실측에 따른 고유진동수 추출이 불가능하여 장력평가의 신뢰성이 현저히 떨어짐에 따라 계측시스템에서 장력측정 항목을 제외하는 것이 타당함.

‣ (장정환 : ㈜티엠이엔씨) 케이블 외부 측정은 의미가 없음.

‣ (박기태 : 한국건설기술연구원) 가속도계를 이용한 케이블 장력측정은 무의미한 것으로 판단됨.

○ 감리단 검토의견

- 전문가 자문의견 및 시설물 운영부서(구 도로시설과)점검결과에 의해 케이블가속도계(3개소)는 제외하고 감액된 공사비(12백만원)는 설계변경시 정산 반영하는 것이 타당함.

‣ 계측기 설치 변경내용

총 계		응력계	처짐계	가속도계		풍향 풍속계	온도계	슈 변위계
				케이블	진동측정용
당초	33	12	2	3	7	1	4	4
변경	30	12	2	-	7	1	4	4

‣ 소요공사비

(단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증․감	비고
유지관리계측비	1식	594,000	582,000	감)12,000

□ 조치의견

○ 상기 감리단 검토내용과 같이 ‘교량 유지관리용 계측시설(케이블가속도계)설치 변경’ 실정보고건에 대해 승인하고 추후 시설물 인수·인계 및 운영부서(교량안전과)의 계측관리 업무에 차질이 없도록 조치코자 함.

- ‘교량 유지관리용 계측시설(케이블가속도계)설치 변경’ : 감) 12백만원

붙  임 : 감리단 실정보고 및 검토의견서 1 부.  끝.