문서번호	공간정보담당관-51
결재일자	2014.1.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공간정보개발팀장	공간정보담당관
최지혜		김태준	전결 01/03 조봉연
협조

『2013년 항공사진 통합관리서비스』 2013.12월 월간보고 및 2014.1.1주 주간보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서 (단체)명	협의내용	협의결과
공간정보 담당관-2312				179,644천원

『2013년 항공사진 통합관리 서비스』

2013.12월 월간보고 및 2014.1.1주 주간보고

사업명	2013년 항공사진 통합관리 서비스
사업기간	2013.6.24. ~ 2014.1.23. (7개월)	진척율	사업관리	개발	DB구축	전체
사 업 비	179,644천원	계획	8.5/10	41.0/50	40.0/40	90/100
사업 PM	씨엠월드컨소시엄 박철희차장	실적	8.5/10	35.8/50	27.8/40	72/100
주요내용	o 계획대비 실적 진행률 저조사유 - 사유: 2013년 항공사진 신규촬영이 기상조건 등으로 예상 일정보다 늦어짐 - 대책: 영상집성 및 보안조치의 DB구축 진행이 늦어졌으나 추가인력의 투입으로 대책을 마련, 사업기간내에 완료토록 함 o 항공사진 영상제작 - 위치보정 및 영상집성, 원본사진 업로드 100%, 보안지역 조치 83%

구분	금 주 실 적 (2013.12.27. ~ 2014.01.02.)	차 주 계 획 (2014.01.03. ~ 2014.01.09.)
시스템 개발	. 사용자 로그인 1-1. 로그인 및 사용자 관리화면 테스트 2. 원본파일 등록 2-1. 원본파일 등록 및 정보 수정 테스트	1. 테스트 1-1. 단위기능 테스트 1-2. 통합 테스트
항공사진DB구축 및 영상지도 제작	1. 서울시 데이터 센터 자료 이관 (2013년 12월 27일 완료 예정) - 망실 및 일부 손상 데이터 입수 및 변환처리 - 누락자료 DB구축 - 주점정보 DB 구축 2. 2013년도 항공영상 보안처리(국정원 보안) - 국정원 보안 심의 자료 입수 - 보안 규정에 의한 보안처리 - 낱장사진 보안지역 사진번호 추출 3. 과거사진 보안지역 조치작업 수행 (2014년 1월 6일 완료 예정) - 전체 : 148,996 - 금주 : 11,300 - 누계 : 123,611 (82.9%)	1. 서울시 데이터 센터 자료 이관 (2013년 12월 27일 완료 예정) - 망실 및 일부 손상 데이터 입수 및 변환처리 - 누락자료 DB구축 - 주점정보 DB구축 - 원본자료 파일명 변경 DB구축 2. 과거사진 보안조치 수행 3. 2013년도 항공영상 보안처리(국정원 보안) - 국정원 보안 심의 자료 입수 - 보안 규정에 의한 보안처리
기타		1. “EA관리, 정보화사업관리스템, 데이터관리시스템, 보안, 하도급절차” 등 교육 이수방안 문의 2. 원본파일 망실 및 손상 자료 입수

※ 2013.12월 월간보고 내용은 첨부화일 참조.

붙임 1. 주간진척보고(2014년01월1주) 1부.

2. 월간업무현황보고서_12월 1부.  끝.